문서번호	도시철도사업부-7446
결재일자	2015.8.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	경전철계획과장	도시철도사업부장		도시철도국장
박노성	박용우	권영찬		08/21 형태경
협 조
	경전철2과장		최광무
	경전철1과장		박동룡
	주무관		권순환
	주무관		신익현

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최결과 보고(제6차)

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업』
통합 공정회의 개최 결과 보고(제6차)

우이-신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업의 효율적인 관리와 원활한 사업추진을 위하여 제6차 통합 공정회의를 개최하고 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘15.08.17.(월) 14:00~16:00

○ 장    소 : 도시철도국 회의실(10층)

○ 참 석 자 : 50명

- 본  부 : 도시철도국장, 사업부장, 토목부장, 건축부장, 설비부장,
경전철계획과장, 분야별 담당과장 및 업무담당

- 사업자 : 법인대표, 건설사업단장, 각 공구 책임감리원 및
현장소장(궤도 및 시스템분야 포함)

□ 회의결과

○ 보고현황

- 보고방법 : 회의 자료에 의거 각 공구 책임감리원이 보고

- 보고내용

· 분야별 공정 추진현황

· 현안사항 및 부진공정 만회대책

· 지시(협조)사항에 대한 조치결과 및 건의사항 등

○ 분야별 요구(협조)사항

<궤도분야>

- 후속 공사시 레일 및 분기기 등의 손상이 없도록 주의 시공 요망

⇒ 토목 및 시스템분야 직원 교육 실시

<시스템분야>

- 시스템 자재는 습기에 민감하므로 습기로 인한 자재 손상이 발생할 수 있으므로 이에 대한 대책 수립 필요(건축분야도 요구)

⇒ 우이신설경전철(주)에서 계획 수립 후 설비, 건축분야와 협의

- 승강장 안전문(스크린도어) 설치 작업을 위해 궤도공사기간 단축 요망

⇒ 궤도분야에서 승강장 안전문(스크린도어) 설치가 가능토록 측량자료 제공

- 자재 투입구 3개소는 시스템분야 시공완료시까지 기능유지 필요

- 시스템분야 작업을 위한 작업장(변전실, 신호통신 기계실, 본선 수전선로)을 ‘15.8.30까지 인도 요망

⇒ 1~4공구 및 궤도분야에서 시스템분야와 협의

○ 주무관청 및 법인 요구(협조)사항

<도시철도국장>

- 그간 공정은 선행공정이 늦어져 지연되었으나 공정표에서는 선행공정(토목분야)은 정상이고, 궤도․시스템분야는 늦어지고 있는 것으로 나타나는 불합리한 점이 있으므로 이를 해소하는 공정표로 개선 필요

- 공정회의에서 논의된 협조사항은 각 분야별로 즉시 상호 협의 해결하고, 그 협의 결과는 차기 공정회의시 보고하여 주시기 바람

- 안전관리과에서 안전점검시 현장과 소통하는 방안으로 업무개선 중에 있는바 문제가 있는 사항은 안전점검시 건의하여 주고, 늘 사고가 없도록 최선을 다하여 주기 바람

<도시철도사업부장>

- 공정회의 시 건의된 사항은 2주이내에 해소가 되었는지 점검하고,  결과를 다음 공정회의 시 보고 요망

<도시철도토목부장>

- 궤도분야는 최대한 공기를 단축해서 ‘15.10.30까지 완료 예정이므로 이를 참고하여 공사 추진 요망

<도시철도건축부장 >

- 건축 공정이 계획 42%, 실적 26%로 대비율 62%로서 공정 추진이 매우 낮으므로 만회 대책을 수립하고 차기 공정회의시 보고 바람

- 건축분야 공사를 위한 작업 공간 확보와 습기로 인한 건축자재 손상이 발생할 수 있으므로 이에 대한 대책 수립 필요

<도시철도설비부장>

- ‘16.11.30 준공기한으로 현시점에서 설비분야는 공기가 3개월 정도 부족한 실정이므로 타 공종에서 최대한 공기를 단축하여 설비분야 공사를 위한 기간 확보 요망

<민우영 법인대표>

- 민자사업 특성상 민간사업자가 의지를 가지고 공정관리를 해야 하며 계획된 공정에 늦지 않도록 관리하여야 함.

- 본부에서 공정을 관리하여 주는 것에 대해 감사드림. 지속적으로 통합공정관리를 실시하여 내년 11월 준공에 차질 없도록 협조 바라며, 잔여공정 관리에 철저를 기하겠음.

□ 향후계획

○ 금회 공정회의시 협조 요청사항은 각 분야별로 사전 협의 조치 후 차기 공정회의 시 보고

○ 차기 공정회의부터 운전 운영계획을 포함하여 보고

○ 차기 공정회의는 시의회(제261회 임시회) 및 중추절을 감안하여 별도 계획 수립(‘15.09.23 예정)

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 통합 공정회의 사진 1부.