문서번호	인재기획과-10769
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설재무팀장	인재기획과장	인재개발원장
유태상	박계완	박기용	08/24 안준호

인재원내 가로등 LED 교체 계획

2015. 8

서울특별시 인재개발원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

인재원내 가로등 LED 교체 계획

인재원내 진입로 등에 설치되어 있는 가로등의 디자인을 개선하고

『LED 빛 조명도시 서울』조성을 위한 일환으로 조명등 광원을

LED로 교체하여 효율을 높이고자 함.

1		시 설 현 황

□ 가로등 현황

구분	등주(폴)		등기구(광원)		비고
	TYPE	수량(본)	TYPE	수량(개)
가 로 등	SUS 8m	16	나트륨 175W	16	2002년 설치
보 행 등			삼파장 55W	16
공 원 등	SUS 4.5m	24	삼파장 55W	24

2		개선 방법

□ 개선대상 : 가로등 및 공원등 56개소

□ 교체내용

○ 가 로 등(16등) : 메  탈 175W ⇒  LED 80W

○ 보 행 등(16등) : 삼파장 55W   ⇒  LED 40W

○ 가로등주(16본) : SUS 8m       ⇒  ST 8m

○ 공 원 등(24개) : 삼파장  55W  ⇒  LED 30W(램프교체)

※ 조명등 기초 재사용

□ 가로등 사진

기존 가로등, 보행등	공원등	교체 LED 등기구	교체 가로등

3		세부 추진계획

□ 발주 및 계약 : ‘15. 8. 24 ~ 8. 30

□ 공사시행 : ‘15. 9. 01 ~ 9. 30

□ 계약방법 : 공사비가 소액으로 전문업체와 계약하고 등기구는 조달구매 의뢰

□ 소요비용 : 44,000천원

○ 조명등 교체 공사  :   8,000천원

○ 등기구 구매(조달) : 36,000천원

□ 예산과목 : 인재원청사유지관리, 공공운영비(201-02)

4		기 대 효 과

□ 청사 가로등을 주변환경에 어울리는 디자인으로 변경하여 교육환경을 개선하고, LED 조명등의 설치로 공공기관   에너지합리화 및 녹색산업 활성화에 기여.

붙임 : 1. 도면 1부.

2. 현황 사진 1부.  끝.