문서번호	건축부-9646
결재일자	2015.8.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	복지시설과장	건축부장		시설국장
조민형	조영수	안재혁		08/24 형태경
협 조
	경리과장		박환
	기록문화팀장		문인환

『서울기록원 건립공사』

설계용역 기간연장 검토 보고

2015. 8

도시기반시설본부

건축부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울기록원 건립공사』

설계용역 기간연장 검토보고

『서울기록원 건립공사』 설계용역과 관련하여 아래와 같이 용역 기간연장 사유가 발생하여 설계용역 기간연장 검토 보고함

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 서울기록원 건립공사 설계용역

○ 위    치 : 은평구 통일로 684(녹번동 산1-61일대)

○ 용    도 : 공공업무시설(기록원)

○ 건립규모 : 지하2층/지상5층, 연면적15,004.0㎡

○ 용역금액 : 1,458,710천원

○ 용역기간 : 2015.01.06 ~ 2015.08.27

○ 설 계 자 : ㈜해안종합건축사사무소 외4

Ⅱ		추진경위

○ 2014.09.14 : 서울기록원 건립 개선계획(시장방침)

○ 2014.12.18 : 설계공모 작품심사 및 설계자 선정((주)해안건축)

○ 2015.01.20 : 설계용역 착수회의 개최

○ 2015.03.16 : 교통영향평가분석 및 개선대책 용역 발주

○ 2015.04.23 : 설계용역 2차 자문회의

○ 2015.06.18 : 기본설계(안) VE 검토회의

○ 2015.06.29 : 기본설계(안) VE 이행회의

○ 2015.08.18 : 설계용역 3차 자문회의

Ⅲ		용역기간 연장 검토

□ 용역기간 조정

○ 조정사유 : 시장보고 후 전면 재설계에 따른 설계 지연, 서울혁신파크 지구단위 계획결정 지연으로 설계용역 기간 연장 사유 발생

- 시장보고에 따른 계획설계 지연, 서울혁신파크 지구단위계획 결정고시 지연, 설계VE 및 자문회의 지적사항 반영 등에 대한 용역기간 연장이 절대적으로 필요함.

○ 조정내용

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
용역기간	‘15.01.06 ~ ‘15.08.27	‘15.01.06 ~ ‘15.10.02	증36일

□ 연기사유 귀책소재  :  도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부  :  미부과

□ 처리의견

- 용역기간 연장은 타당하며, 상기와 같이 용역기간 연장 계약변경 코자 함.

Ⅳ		향후추진계획

○ 2015.09 : 실시설계 VE 실시 및 은평구청 건축협의

○ 2015.10 : 설계용역 준공

○ 2015.11 : 공사 및 감리 발주

○ 2015.12 : 공사 착공

따로붙임 : 설계자 기간연장요청 공문서 및 공정표 1부. 끝.