문서번호	시민소통담당관-14133
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시민청팀장	시민소통담당관		시민소통기획관
박성운	신익수	김진만		08/24 代김진만
협 조
	건축관리과장		곽동호

(가칭)동남권역 시민청(聽) 조성관련

건축설계업무 추진부서 변경계획(안)

2015. 8

시민소통기획관

(시민소통담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	도시기반시설 본부(건축부)
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

(가칭)동남권역 시민청(聽) 조성관련

건축설계업무 추진부서 변경계획(안)

SBA컨벤션센터(가설건축물)에 조성중에 있는 (가칭)동남권역 시민청의 원할한 추진을 위하여 아래와 같이 건축설계 업무추진부서를 변경코자 함.

Ⅰ		추진배경

(가칭)동남권역 시민청 조성사업의 효율성 증대 필요

→ 지역주민의견 반영과 향후 운영에 대비한 최적안 도출 필요

강남구의 동남권역 시민청 조성반대에 따른 사업기간 지연발생

→ 조성안(설계안)의 신속한 의사결정을 통한 사업기간 단축 필요

2015년도 예산집행 철저

→ 출납폐쇄기간 단축에 따른 예산 조속 집행 필요

Ⅱ		(가칭)동남권역 시민청 추진개요

조성개요

위    치 : 서울시 강남구 남부순환로 3104 (대치동)

규    모 : 지상 1,2층 개보수 (약 3,220㎡)

조성기간 : 2015. 3 ~ 2015. 8월말(‘16.3월 변경)

소요예산 : 총 1,583,507천원(‘15년도 예산)

시 설 비	공 사 비	1,499,903천원
	설 계 비	71,852천원
시설부대비	시범사업 업무 추진 제반경비 등	11,752천원

※ 설계공모에 따른 공모비용 등은 시설비 등에서 지출

추진현황

시민청 확대 조성 계획 : '15.3.6

공사의뢰 (시민소통담당관→도시기반시설본부)

- 시민청 확대조성위한 시범사업 추진관련 사전검토 및 공사의뢰(‘15.3.11)

- 동남권역 시민청 조성관련 설계업무 우선착수 요청(‘15. 7.24)

설계업무 추진현황(도시기반시설본부)

- 공공건축가 선정의뢰(‘15.8.4) 및 선정통보(‘15.8.20)

- 공모지침서 및 과업내역서 작성(‘15.8.11) 및 설계추진 방침 수립(‘15.8.12)

- 기술용역타당성 심사의뢰(‘15.8.13) 및 심사완료(‘15.8.18)

- 설계공모 심사위원회 구성(‘15.8.24)

Ⅲ		변경계획(안)

사업관련 추진부서 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
설계업무	도시기반시설본부 (건축부)	시민소통담당관
공사업무	도시기반시설본부 (건축부)	변경없음
운영업무	시민소통담당관	변경없음

변경사유 : 신속한 의사결정등 업무 효율화를 위한 업무프로세스 재설계로 사업기간 단축 등

기타

기 추진된 공공건축가 선정, 심사위원 및 각종 심사등과 기본 설계방침에 대하여는 인수인계받아 추진하고, 일정에 대하여는 변경수립 추진

Ⅳ		행정사항

시민소통담당관

설계업무 추진 등 : 설계공모 및 용역 추진, 건립자문위 운영 등

도시기반시설본부(건축부)

변경계획에 따른 설계업무 협조 및 향후 공사업무추진 등.  끝.