문서번호	설비부-10392
결재일자	2015.8.24.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
박병환		김영수	08/24 박기형
협조

「경춘철교 정비 전기공사」

준공기한 연기 검토 보고

2015. 08.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「경춘철교 정비 전기공사」

준공기한 연기 검토 보고

『경춘철교 정비 전기공사』관련, 책임감리원으로 부터 전기공사 준공기한 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고드림.

▷ 관련근거 : 경춘철교 정비 전기공사 준공기한 연장요청(선진경춘감_15-19 ’15.08.21)호

사업개요

□ 공 사 명 : 경춘철교 정비 전기공사

□ 위    치 : 노원구 월계동 224-3(경춘철교)

□ 규    모 : 경춘철교(L=176.5m)

- 전력간선공사 1식, 동력, 전등설비 1식

- 케이블트레이 1식, 접지설비 1식

□ 계 약 자 : 월드전기(주)  대표 이은상

□ 계약금액

- 111,222,264원(금일억일천일백이십이만이천이백육십사원)

□ 계약기간

- 2014.12.26 ~ 2015.08.30

□ 감 리 자 : ㈜선진엔지니어링종합건축사무소

실정보고 내용

□ 준공기한 연기

- 당  초 : 2014.12.26 ~ 2015.08.30

- 변  경 : 2014.12.26 ~ 2016.05.23

□ 연기사유 : 선행공종(토목 : 하천점용허가) 지연에 따른 설치시기 미도래

- 경춘철교 하천점용허가 지연 및 수방기간 일수 반영으로 준공기한 조정

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과

조치의견

□ 선행공사인 토목공종 지연으로 후속 공종인 전기공사 진행이 불가피 함.

□ 준공기한 연기에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기 의뢰코자 함.

붙임 : 관련공문서 1부. 끝.