문서번호	물재생과-5533
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
김근수		강병수	08/24 김동기
협조

설계용역 준공기한 연기보고

[2처리장 소화조 활용한 유량조정조설치 실시설계용역]

2015. 8.

중랑물재생센터

[물재생과]

설계용역 준공기한 연기보고

우리센터에서 추진중에 있는 『2처리장 소화조를 활용한 유량조정조설치 실시설계용역』을 시행 중 용역자문회의 시행과 지적사항 검토 및 설계반영 등의 추가조치 등으로 용역기간의 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자 함

용역개요

❍ 용 역 명 : 제2처리장 미사용 소화조를 활용한 유량조정조설치 실시설계용역

❍ 용역개요 : 소화조 유량조정조 설치 V= 3,630㎥, 2개조

❍ 용역기간 : 2015. 7. 2. ~ 2015. 8. 30.

❍ 용 역 비 : 38,700천원

❍ 용 역 사 : 대한민국상이군경회 대표 김덕남

준공기한 연기

❍ 사  유

- 설계용역 전문가 자문회의 시행과 결과에 따른 의견검토, 반영 및지적사항에 대한 설계도면 수정 등의 과업기간이 필요하고, 용역기한의 절대공기가 부족한 실정으로 20일간의 용역기한 연기를 통하여 용역시행에 철저를 기하고자 함

❍ 연기기한

- 당 초 : 2015. 08. 30

- 변 경 : 2015. 09 19

❍ 관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 90조

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 본 설계용역의 내실을 기하고자 위와 같이 준공기한을 연기하고자 함. 끝.