	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	설계공모 공고 의뢰(시립노원청소년직업체험센터 설계용역)

1. 본부장 방침 건축부-9526(2015.8.20)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 『시립노원청소년직업체험센터 건립공사』 설계용역과 관련하여 따로붙임과 같이 건설기술관리법 시행령 제50조 제2항 및 지방계약법 시행령 제42조의4에 의한 설계공모를 시행하고자 공고를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 사업개요

가. 용 역 명 : 시립노원청소년직업체험센터 설계용역

나. 위    치 : 서울시 노원구 하계동 224-9번지외 3필지

다. 건축규모 : 지하1층/ 지상 3층, 연면적  2,840㎡

라. 용    도 : 수련시설(생활권수련시설 중 청소년특화시설)

마. 설 계 비 : 366,630천원(공사비 7,095,470천원)

○ 설계공모(현상설계) 개요

가. 관련근거

- 건축서비스산업진흥법 제21조 및 지방계약법 시행령 제42조의4

- 건축설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2014-345호, 2014.6.12.)

나. 공모방법 : 일반공개공모

다. 설계공모 참가자의 자격

1) 설계공모 공고일 현재 건축사법에 의한 건축사 자격 소지자로서 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자

2) 응모신청등록일부터 작품접수기간까지 해당관청으로 부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가제한 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음.

3) 공동응모시 동 응모자 모두 “1)” 및 “2)”의 자격조건을 모두 갖추어야하며 공동수급체 구성원수는 5인 이하의 범위에서 구성 가능함. 단, 구성원별 계약 최소지분율 5%이상으로 해야 하며, 과반수의 비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함

4) 외국건축사면허(자격) 취득업체는 설계공모 응모는 단독으로 가능하나 당선된 후 상기 1)항의 건축사사무소개설자와 공동이행방식으로 설계용역 수의계약 체결 가능

라. 공고방법 : 서울시 홈페이지( http://infra.seoul.go.kr ) 및 조달청 g2b 등 이용

※ 설계공모 심사위원 명단 포함

마. 심사방법

- 설계공모지침서 규정에 따라 『설계공모 심사위원회』 심사

- 입상작 작품 및 보상

· 당선작(1점) : 설계용역 수의계약 대상자로 선정

· 우수작 및 가작 : 응모작품수에 따라 보상비 지급

바. 설계공모 추진일정(예정)

- 설계공모공고 : 2015. 8.27(목)

- 현 장 설 명 : 2015. 9. 4(금) 14:00

- 응모신청서등록 : 2015. 9. 7(월) ~ 9. 8(화)

- 작 품 접 수 : 2015.10.26(월)

- 작 품 심 사 : 2015.11. 5(목) 예정

사. 향후 추진일정

- 2015.12월 : 설계용역 계약 및 설계용역 착수

- 2016. 6월 : 설계용역 준공(설계기간 210일)

- 2016.10월 : 공사 착공

- 2017.12월 : 공사 준공

따로붙임 : 1. 설계용역 시행계획 방침서 1부.

2. 설계공고 공고문 1부.

3. 설계공모지침서 1부.

4. 과업내용서 1부.

5. 설계공모 심사위원 명단 1부. 끝.

	건축부장
전문관	전재진		건축관리과장	곽동호		건축부장	전결 08/24 안재혁
협조자
시행	건축부-9657	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (프리미어플레이스빌딩 13층)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2635	/전송	02-3708-2659	/		/	대시민공개