투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(현장사무실 기간연장 실정복 승인)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2015-08-25 00:08:00

3.지 시 내 용

가. 선사고덕0420-348호(2015. 8.18)와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 총차 공사기간 연장에 따른 현장사무실 임대기간 연장에 대하여 감리단 검토 의견과 같이 승인 통보하오니 증액되는 공사비에 대하여는 추후 본부 설계변경심의위원회 심의 결과에 따라 설계변경에 반영 하시기 바랍니다.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					08/25 진재섭
협조자
시행			토목부-17706									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층 도시기반시설본부 토목부															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개