함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 기계설비유지보수공사 설계변경 시행

1. 정수시설과-3627(2015.8.25.)호, 정수시설과-3607(2015.8.24.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『2015년 기계설비유지보수공사』에 대해 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2015년 기계설비유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체 : 광진기계설비 대표 조희선

다. 공사기간 : 2015.06.03 ~ 2015.12.20

라. 설계변경 금액 내역                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총공사비	60,108,170	61,600,000	증 1,491,830

마. 설계변경사유 : 신규공종 및 물량 증․감 발생, 보험료 미납에 따른 정산

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(기계설비유지관리)                          ※추산필 : 81번(8/25)

붙임 : 1. 설계변경 보고서, 내역서, 도면 각 1부

2. 설계변경 심의 소위원회 개최 결과보고서 1부

3. 합의서 1부. 끝.

주무관	곽대근		주무관	권영철		정수시설과장	김창현		광암아리수정수센터소장	08/25 代손호철
협조자	주무관	이정원
시행	정수시설과-3635	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293 광암아리수정수센터 정수시설과	/
전화	02-3146-5373	/전송	02-3146-5309	/	gwak0914@seoul.go.kr	/	대시민공개