투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	고산자교 등 5개소 도로시설물 정밀점검용역 설계변경 시행

우리 사업소에서 시행중인 『고산자교 등 5개소 도로시설물 정밀점검용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하여 용역추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 고산자교 등 5개소 도로시설물 정밀점검용역

나. 용 역 사 : 고황건설(주)

다. 용역기간 : 2015.03.10. ~ 2015.09.05.

라. 계약금액 : 금54,674,040원

마. 설계변경사유 : 자문위원 인원감소 등에 따른 비용감액

바. 설계변경내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총용역비		54,674,040	53,974,040	감 700,000
도급비	공급가액	48,885,494	48,885,494	-
	부가가치세	4,888,546	4,888,546	-
	설계자문비	900,000	200,000	감 700,000
	계	54,674,040	53,974,040	감 700,000

사. 예산과목 : 도로시설관리, 도로시설물 운영, 시설물 안전점검 및 진단,

시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1) 설계변경 내역서 및 자문회의 개최결과 1부. 끝.

주무관	김형섭		시설보수과장	박춘배		성동도로사업소장	08/25 이종엽
협조자	계약1팀장	김점선		관리단속과장	홍영두
시행	시설보수과-2972	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	02)2210-1551	/전송	02)2210-1562	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개