문서번호	토목부-17668
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
남덕희		명경출	08/25 代서관석
협조
	주무관		시희식

-강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사-

준공기한 연기 검토보고

[시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

도시기반시설본부

(토목부)

-강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사-

준공기한 연기 검토보고

【시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역】

『강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계 용역』과업기간 연장에 따라 해당 건설사업관리용역 과업기간 연장 요청의 검토 보고임.

1		용역개요

○ 용 역 명 : 강남순환도시고속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역

○ 위    치 : 시흥대교 남단 (서울시 금천구 독산동~경기도 광명시 소하동)

○ 사업내용 : 강남순환 4공구 시점부 지하차도 보완설계 건설사업관리용역

- 규모 : 지하차도 폭 4차로, 연장 650m

․Box(4차로, 연장 315m), U-Type(4차로, 연장 335m)

○ 용역기간 : 2014. 8.19. ~ 2015. 8.30.

○ 계약금액 : 금95,275,000원

○ 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소 대표 최태희

2		보고내용

○ 2015. 8.18. : 과업기간 연장 요청(제일 제 15 - 1798호)

○ 준공기한 연기

- 당    초 : ´14.8.19. ~ ´15.8.30.

- 변    경 : ´14.8.19. ~ ´16.1.31.

- 지체상금 : 미부과

○ 연기사유

- 도로계획 관련 한국도로공사 등 관계기관과 협의 진핸중이며 총 7차례 주민간담회를 실시한 결과, 민원에 따른 선형 및 구조물 변경 계획 반영을 위한 설계 기간 부족 등 보완설계용역의 과업 연장으로 인한 건설사업관리용역 과업기간 연장

※ 보완설계용역 기간연장 : 당초 ´14.8.1~´15.7.30→변경 ´14.8.1~´15.12.31.

3		조치의견

○ 설계용역에 대한 과업연장에 따라 부실설계를 방지하고 내실있는 설계관리를 위해 건설사업관리용역 준공기한을 연기하여 업무 수행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 과업기간연장요청 공문 1부.  끝.