문서번호	산지방재과-2425
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
		사면정비팀장	산지방재과장
유진석		조성만	03/13 정중곤
협조

~ 관악산 돈화문계곡 사방댐 설치공사 ~

추가 정비요청사항에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3. 13

푸른도시국

(산지방재과)

~ 관악산 돈화문계곡 사방댐 설치공사 ~

추가 정비요청사항에 대한 검토 보고

관악산 돈화문계곡 사방댐 설치공사에 시.구 합동점검 및 감리실정보고 등 현장여건에 따른 추가정비사항에 대하여 예산지원을 요청한 사항임.

1. 관련근거 : 관악구 공원녹지과-4226(2014.3.10)호와 관련임.

2. 공사개요

○ 공 사 명 : 관악산 돈화문 계곡 사방댐 설치공사

○ 위    치 : 관악구 남현동 산100-14일대(관악산 수도방위사령부 일대)

○ 공사기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 5. 24

○ 공사내용 : 사방댐 설치, 계류정비, 유지관리도로 조성

○ 도 급 액 : 627백만원

○ 공 정 률 : 30%

3. 추가 정비사항

○ 사   유

- 사방댐 상부구역 등 공사 미반영구간 안전성 확보를 위한 추가 정비필요

- 사방시설물(PC암거 등) 안전성 확보를 위한 추가 정비 필요

○ 세부내용

- PC암거설치구간 안전휀스설치 : L=40m

- 사방댐 상부 계류구간 등 일부 미반영 구간 정비(기슭막이, 바닥막이 등) : 기슭막이 및 계단식 바닥막이 설치로 계류구간 정비 및 구배 조정 12%~15% → 10%

- 유지관리도로 절토면 노출지역 정비(야면석 메쌓기 등) : A=240㎡

- 유지관리도로의 원할한 기능유지를 위한 포장폭 조정(3m→4m) : A=300㎡

- 기타 공사구간 저촉 시설물(경계휀스, 통신관로, 군부대 시설물 등) 이설

○ 소요예상액 : 138백만원

4. 조치계획

○ 위 사항과 같이 현장합동점검시 설계에 미반영된 사항과 시설물 설치 구간의 안전성 확보를 위해 추가로 정비가 필요한 사항으로, 본 사업을 추진중인 관악구에서 공사물량 증가분에 대한 예산지원을 요청한 사항임.

○ 본 사업의 원활한 진행을 위하여 추가정비요청 사항에 대한 예산을 지원하여 우기전에 완료될 수 있도록 추진하고자함.

붙임 : 1. 예산지원요청 공문 1부.

2. 계획평면도 1부.

3. 계략공사비산출내역 1부.

4. 현황사진 1부.  끝.