투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	조달물품 수량 및 금액 변경 요청(흙콘크리트, 중랑캠핑숲 시설정비공사)

1. 시설과-3975(2015.6.1)호 및 공원운영과-10774(2015.6.9)호와 관련입니다.

2. 중랑캠핑숲 시설재정비공사와 관련하여 기 계약된 관급자재에 대하여 다음과 같이 수량 및 금액을 변경을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 흙콘크리트 조달구매(중랑캠핑숲 시설재정비공사)

나. 업 체 명 : 리사이클㈜  대표 박찬호

다. 수량 및 금액변경(기한변경 없음)

구분	품명 (규격)	수량 (㎡)	단가	금 액			식별번호
				품대계	수수료	합계
변경전	흙콘크리트 (T100,보도용)	1.89	26,000	49,140	270	49,400	22562193
변경후		0	-	-	-	0
변경전	흙콘크리트 (T200,주차장용)	853.6	44,000	37,558,400	202,810	37,761,210	21699515
변경후		256.7	44,000	11,294,800	60,990	11,355,790

라. 변경사유 : 산책로의 표층만 정비하는 공법으로 변경

붙임 : 보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	송창선		조경팀장	남상국		시설과장	08/25 代김윤철
협조자
시행	시설과-6038	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5967	/전송	02-3783-5969	/	pinus74@seoul.go.kr	/	대시민공개