의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-11767
결재일자	2015.8.25.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		민자사업팀장	도로계획과장	도시안전기획관	도시안전본부장	결재
김정식		정회원	최동필	권기욱	08/25 김준기
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 874번, 함진규 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 함진규 국회의원 요구자료 1부.  끝.

함진규 국회의원(국토교통위원회, 새누리당)

요구번호 : 874번

51. 서울시 서부간선도로 지하화 추진현황

□ 의원님께서 요구하신 자료를 다음과 같이 제출합니다.

51. 서울시 서부간선도로 지하화 추진현황

○ 사업개요

- 사업위치 : 영등포구 양평동(성산대교 남단) ~ 금천구 독산동(금천IC)

- 사업규모 : 왕복 4차로, 연장 10.33km(소형차 전용)

- 사업기간 : 2010. ~ 2020.

- 총사업비 : 5,200억원(민간 3,820억원, 시 재정지원 1,380억원)

- 사업시행자 : 서서울도시고속도로(주) - 현대건설 등 8개사

○ 추진경위

- '07.12.20	: 민간제안서 제출

- '08.12.08	: 사업제안서 타당성조사 완료(KDI PIMAC)

- '09.06.29	: 민간투자사업심의위원회 심의

- '09.12.31	: 제3자 제안공고  / '10.06.14  : 우선협상대상자 선정

- '12.05.22	: 재정지원금 축소 등 개선방안 검토 착수

- '13.06.03	: 개선방안 마련

- '14.08.13	: 실무협상 완료

- '14.10.30  : 市 재정계획심의위원회 심의

- '14.12.18  : 기획재정부 민간투자심의위원회 심의

- '15.03.11  : 실시협약 체결

- '15.08.21  : 환경영향평가 협의 완료

- '15.08.현재 : 실시계획 승인을 위한 유관기관 협의중

○ 향후계획

- '15.10.  : 공사착공(공사기간 60개월)

○ 위치도

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	정 회 원
	☎2133-8073	담당자	김 정 식
	작 성 일 : 2015. 08.