문서번호	도로계획과-11922
결재일자	2015.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장
신대식	오재영	전결 08/26 최동필

여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역

설계변경 검토 보고

2015. 8

도로계획과

여의교 확장 외 1개사업 기본 및 실시설계용역

설계변경 검토 보고

○ 사업구역내 구조물 설치구간에 대한 추가 지하매설물 확인      줄파기 및 GPR탐사 등 결과에 따른 설계변경 사항 검토 보고임

- 도로계획과-4349호(‘15.3.31.) : 설계업무 조속 추진

- 기술심사담당관-5119호(부시장방침 98호, ‘13.3.25) : 줄파기 및 GPR탐사

- 토목부-20936호(부시장방침 349호, ‘13.11.12) : 지반조사 시행

		용역개요

○  용 역 명 : 여의교외 1개 사업 기본 및 실시설계용역

○  용역규모

- 여의교 확장 : 8차→9차로, 연장 240m

- 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치 : 폭 6.4m, 연장 635m

○  용역기간 : 2012.4.12 ~ 2015.12.30

○  계약금액 : 302,399천원

※  총사업비 : 95억원(여의교 확장 45억원, 진입램프 설치 50억원)

		추진경위

○ 여의교 확장

-  ‘12.04.12    : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

-  ‘12.11. ~ ‘13.3 : 하천점용 협의(서울지방국토관리청)

-  ‘14.06.03    : 건설기술심의 - 조건부 채택

-  ‘14.07.08    : 기본설계 완료에 따른 실시설계 요청(도로계획과→토목부)

-  ‘15.08. 현재  : 실시설계 진행 중(토목부)

○ 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치

-  ‘12.04.12    : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수

-  ‘12.11. ~ ‘14.1 : 하천점용 협의(서울지방국토관리청, 내부 자문회의 2회)

-  ‘14.04. ~ ‘14.10 : 시 디자인심의(3회)

-  ‘14.12.12    : 자문회의 개최

-  ‘15.08. 현재  : 건설기술심의 준비 중

		보고내용

○ 지하매설물 확인 추가 조사내용

가. 지하매설물 조사

- 줄파기 조사 L=83.6m, B=1.2m, GPR탐사 L=1,381.8m

- 조사대상구간 : 올림픽대로 잠실방향 및 김포방향, 샛강생태공원

나. 올림픽대로 추가 노선 측량

- 올림픽대로 이설 : L=0.98km(중심선측량, 종단측량, 횡단측량)

다. 지하철 5호선 현황측량

- 3급 기준점 측량 2점, 4급 기준점 측량 14점,

- 2급 수준측량 1.5km, 지형 현황측량 L=180m, A=62.4㎡

○ 설계변경(용역비 증액)

가. 당초 302,399,000원 → 변경 389,046,000원(증 86,647,000원)

구 분			금 액	증 감
총 용 역 비		당 초	302,399,000원	증 86,647,000원
		변 경	389,046,000원
공급가액	설계비	당 초	222,642,353원
		변 경	222,642,353원
	측량비	당 초	20,458,472원	증 48,999,340원
		변 경	69,457,812원
	교통분석비	당 초	16,706,456원
		변 경	16,706,456원
	경관설계	당 초	12,900,000원
		변 경	12,900,000원
	지하매설물 조사비	당 초	-	증 29,094,228원
		변 경	29,094,228원
부가가치세		당 초	27,270,720원	증 7,809,360원
		변 경	35,080,080원
손해배상공제료		당 초	1,441,000원
		변 경	1,441,000원
설계자문비		당 초	980,000원
		변 경	980,000원
관리청복구비		당 초	-	증 744,990원
		변 경	744,990원

나. 사유 : 지하매설물 추가 조사 및 측량 물량 증가에 따른 용역비 증액

- 도로계획과-4349호(‘15.3.31.), 기술심사담당관-5119호(‘13.3.25),

토목부-20936호(부시장방침 349호, ‘13.11.12)

		조치계획

○ 상기 지하매설물 조사 결과 증액된 설계비는 금년도 편성예산을 사용하여 예산 범위 내에서 설계변경 시행코자 함.

- 여의교 확장 및 여의교 남단 교차로 설치 : 실시설계비 1억 원

- 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치     : 실시설계비 1억 원

붙임 : 1. 작업지시 관련문서 1부.

2. 설계변경 요청 1부.

3. 변경설계내역서 1부.

4. 지하매설물 현황조사 보고서 1부(별도 책자)

5. 부시장방침 98호(‘13.3.25) : 줄파기 및 GPR탐사

6. 부시장방침 349호(‘13.11.12) : 지반조사 시행.  끝.