문서번호	토목부-4779
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
박상철	최순철	03/13 노우성

현장 관계자 회의 결과 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

서울특별시도시기반시설본부

(토 목 부)

현장 관계자 회의 결과 보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

본 공사 시행과 관련 전반적인 공정 추진이 되지않아 공동도급자인 ㈜신성건설외 2개사의 PM과 회의를 개최하고 그 결과를 보고하는 사항임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 용역규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1.88Km

○ 사 업 비 : 838억원

○ 공사기간 : '12.8.2 ~ ′14.3.24

○ 도 급 자 : ㈜신성건설외 2개사

○ 감 리 자 : ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 회의참석자

○ 본  부 : 광역도로과장, 업무담당

○ 도급자 : ㈜신성건설 이사 김동완외 2명

□ 회의내용

○ 잦은 직원교체로 업무 단절에 대한 대책

- 현안 미결사항 30여건 처리

○ 직원 업무 미숙

- 시공상세도, 시공계획서 등 작성 능력 미숙

○ 고덕천 하수박스 공사 미착수

- 시공계획서, 시공상세도 미작성, 하천부지 점용허가 기간 만료

○ 용마터널, 구리암사대교 개통에 따른 본 현장 금년 11월 개통 우려

□ 회의결과

○ 직원 2명 보강하여 공정 추진에 어려움이 없도록 조치

○ 추후에도 동일한 사항이 반복되면 3개사 대표이사와 회의 개최하여 제재 조치

□ 조치의견

○ 상기 내용을 도급자 및 감리자에게 통보하여 금년 11월 개통에 만전을 기하고자 함.  끝.