투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)-강서 설계변경(1차) 시행

「2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)-강서」에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2015년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)-강서

2. 공사기간 : 2015.03.10. ~ 2015.12.31.

3. 도 급 자 : 세한종합전기  대표 오진권

4. 설계변경내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	389,933,650	440,000,000	증) 50,066,350
도 급 비	349,933,650	400,000,000	증) 50,066,350
관 급 비	30,000,000	30,000,000	-
이 전 비	10,000,000	10,000,000	-

5. 설계변경 사유 : 본 공사는 구로구 및 양천구 지역에 대한 교통신호기 시설물 유지보수를 위한 공사로, 현재 공사금액의 상당부분을 집행한 상황으로, 향후 교통신호기 보수, 긴급 민원처리 등을 위하여 사용할 추가 공사비를 확보하기 위함.

6. 예산과목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통 개선, 교통안전시설물관리, 교통신호기 신설 및 보수, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01).

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 감리 기술검토의견서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 설계변경 합의각서 1부.  끝.

주무관	박태진		기전과장	박재경		강서도로사업소장	08/27 조병준
협조자	계약1팀장	김점선
시행	기전과-10747	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동)	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개