투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(창동지하차도 장애인 이동편의시설 엘리베이터 구매설치)

1. 창동 지하차도 장애인 이동편의시설 엘리베이터 구매설치와 관련하여 준공기한을 아래와 같이 연기코자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

구 분	내 용	비 고
공 사 명	창동지하차도 장애인 이동편의시설 엘리베이터 구매
공사개요	장애인 엘리베이터 2대 구매설치
공사기간	2014. 11. 27 ~ 2015. 8. 31
계약금액	금 113,114,000원
계 약 자	주식회사 한테크 대표 김정호

나. 준공기한 연기

- 당초 : 2014. 11. 27 ~ 2015. 08. 31

- 변경 : 2014. 11. 27 ~ 2015. 09. 14

다. 연기사유

- 장마 등 우천으로 인한 절대공기 부족으로 준공기한 연장

라. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 북부도로사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 :  1) 준공기한 연장보고(방침서) 1부

2) 준공기한 연기의뢰서, 합의각서 및 연기요청공문 각 1부. 끝.

	기전과장
주무관	문석기		기전과장	08/27 이영목
협조자
시행	기전과-8488	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/	http://www.seoul.go.kr
전화	944-5471	/전송	945-5074	/		/	대시민공개