문서번호	도시철도설비부-8793
결재일자	2015.8.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	차량과장	도시철도설비부장
오금석	황영일	08/27 정찬웅

우이~신설선

검수설비(크레인) 공장검수 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8. 27.

도시철도 설비부

우이~신설선 검수설비(크레인) 공장검수 결과 보고

우이~신설선 차량기지내에 설치하여 중량물 운반에 사용할 크레인에 대한 공장검수를 실시하고 보고함

□ 개요

- 제작내역

품 명	규 격	용 도	비고
크레인	2.5톤, 6m(S)×14m(T)×7.7m(L)	차륜전삭고 칩배출용
	1.0톤, 8m(S)×22.5m(T)×6.35m(L)	자재창고 운반용
	7.5톤, 10.4m(S)×35m(T)×10m(L)	동시인양선용

- 제 작 사 : 삼원기계제작소(경기도 김포시 대곶면 율마로 143)

- 검수일시 : 2015.8.26(수) 15:00 ~ 16:30

- 검 수 자 : 도시기반시설본부(오금석), 감리단(명현중), 시공사(김진호)

□ 지적사항 및 조치계획

- 주행차륜 커버 크기가 작음 → 커버 추가 설치

- 주행, 횡행차륜부 도색불량 → 분해 후 재도색

- 주행전동기 급전선 전선관 없음 → 후렉시블전선관 설치

- 작업자통로부내 노출된 볼트에 작업자 상해 우려 → 해당볼트에 캡너트 추가설치

- 급전선로 지지대 녹발생 우려 → 녹방지 처리

□ 향후계획

: 해당 크레인에 대한 공장검수 결과 제작사양에 맞게 제작된 바, 아래일정에 따라 차량기지에 반입하여 설치예정임.

다만 일부 미흡한 사항에 대하여는 현장반입 전, 시정완료토록 조치

- 2015. 8.27 : 지적사항 보완

- 2015. 8.28 : 우이동 차량기지내 반입

- 2015. 9.15 : 차량기지내 현장 설치 완료

- 2015. 9.16 ~ 10. 2 : 시운전 실시 및 법정검사 신청

- 2015.10. 5 ~ 10. 8 : 법정검사 실시

따로붙임 : 크레인 검수사진 1부.   끝.