투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청

1. 우리사업소에서 시행중인 『창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기코자 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 창동지하차도 장애인 이동 편의시설 설치공사

나. 계약상대자 : 주식회사 고황  대표 정삼술

다. 준공기한 연기

- 당초 : 2014. 11. 26 ∼ 2015. 8. 31

- 변경 : 2014. 11. 26 ∼ 2015. 9. 25

라. 연기사유

- 선행공정(엘리베이터설치)이 연기됨에 따른 절대공기 부족

마. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기 보고서 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
★주무관	김영원		시설보수과장	전결 08/27 정재현
협조자
시행	시설보수과-7182	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 913(번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5455	/전송	02-945-5073	/	ywk2601@seoul.go.kr	/	대시민공개