시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(홍제천고가교 내진성능개선공사)

1. 서울특별시 시설관리공단 도로시설처-9743(2015.08.27.)호와 관련입니다.

2. 2014년도에 계약되어 2015.1.1.일자 조직개편 및 자동차전용도로 시설물 관리 시설공단 이관에 따라 공단에서 시행 중인 『홍제천고가교(성산1, 2-1, 4램프) 내진성능개선공사』에 대하여 붙임과 같이 설계변경 서류를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 공 사 명 : 홍제천고가교(성산1, 2-1, 4램프) 내진성능개선공사

2) 계 약 자 : ㈜노은건설

3) 공사금액 : 금일십팔억육백이십만원정(금1,806,200,000원)

나. 변경내용

1) 주요공종 수량 변경내용

명 칭	규 격	단위	수 량		증 ․ 감
			당 초	변 경
전단키 설치	일방향, 양방향	EA	5	5	-
강재면진받침 설치	2,000~11,000kN	EA	81	81	-
점검통로 설치	A-TYPE, 하향식, L=6m	개소	11	10	감) 1

2) 금액 변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
도 급 비	1,810,116,000	1,806,200,000	감) 3,916,000
공 급 가 액	1,645,560,000	1,642,000,000	감) 3,560,000
부가가치세	164,556,000	164,200,000	감) 356,000

다. 변경사유 : 수량 증감 및 재경비 정산에 따른 조정

라. 예산과목 : (도시개발특별회계)도로시설과, 도로시설관리, 자동차전용도로교                                       량관리, 내부순환로 내진보강, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 관련 공문 1부.

2. 설계변경 검토보고 1부.

3. 변경설계서(용량초과로 추가자료 별송) 1식.

4. 합의각서 1부.  끝.

	도로시설과장
주무관	신희승		시설기술팀장	이상호		도로시설과장	08/28 이덕기
협조자
시행	도로시설과-10267	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1674	/전송	02-2133-1078	/	rolshs@seoul.go.kr	/	부분공개(6)