문서번호	체육정책과-2202
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		체육시설팀장	체육정책과장
이재익		이용민	08/28 이형삼
협조

준공기한 연기 보고

(야구테마거리 실시설계 용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

관광체육국

(체육정책과)

준공 기한 연기 보고

용역개요

가. 용  역  명 : 야구테마거리 조성 사업 실시설계 용역

나. 계  약  자 : ㈜이산, 주식회사 조경그룹이작

다. 계약  금액 : 54,461,000원(오천사백사십육만일천)

라. 계약년월일 : 2015. 7. 1.

마. 준공예정일 : 2015. 8.29.

2. 보고내용

위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 합니다.

가. 준공기한

- 당초 : 2015. 8.29.

- 변경 : 2015. 9.30.

나. 귀책사유 : 서울특별시

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

- 서울지방 국토 관리청 하천 점용허가 협의 미확정으로 과업 수행의 절대공기가 부족하여 준공기한 연기 필요

2015. 8.

보고자 : 지방시설주사보 이 재 익

첨부 1) 과업기간 조정 요청 문서 1부.

2) 용역기간 연장 요청 1부 . 끝.