문서번호	급수운영과-14573
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	강동수도사업소장
김용현	전명수	08/28 김명용
협조	시설관리과장	代송종범
	주무관	송종범

2015년 7월

상수도관 정비공사 추진 실적 보고

2015.  8.   .

강동수도사업소

(급수운영과)

2015년 7월

상수도관 정비공사 추진 실적 보고

2015년 7월 상수도관 정비공사 추진실적 및 향후 추진계획을 보고 드림.

[관련근거]

- 2015년도 성과관리계획 확정에 따른 시스템 력 및 평가자료 제출   : 기획예산과-4857(′15.06.03)

- 2015년 노후 배급수관 정비공사 추진계획 알림     : 누수방지과-367(′15.01.15)

- 2015년 노후 송배수관 정비사업 대상선정 통보     : 배수과-23(′15.01.03)

현 황

□ 목 표  : 9.1㎞  (사업비 : 11,436백만원)

(단위: ㎞, 백만원)

구 분		계	송파구	강동구	비 고
계	정비연장	9.1	3.65	5.45
	사업비	11,436	4,318	7,118
송배수관정비	정비연장	2.6	0.4	2.2
	사업비	6,200	1,700	4,500
배급수관정비	정비연장	6.5	3.25	3.25
	사업비	5,236	2,618	2,618

추진실적

□ 7월말 현재 정비실적 : 3.355㎞(송배수관 0.110, 배급수관 3.245㎞)

구 분	계	송배수관			배급수관			비 고
		소계	송파	강동	소계	송파	강동
정비목표	9.100	2.600	0.400	2.200	6.500	3.250	3.250
실적누계	3.355	0.110	0.000	0.110	3.245	1.335	1.910
정비율(%)	47.1	11.2	0.0	20.1	50.1	46.1	58.8
7월실적	1.150	0.110	0	0.110	1.040	0.580	0.460
6월누계	2.205	0.000	0	0	2.205	0.755	1.450

향후계획

□ 단위 발주사업 8건중  10월 중 6건, 12월 중 2건 준공 예정으로 착공 시기는 용역설계 등으로 인해 다소 늦었으나 계획 공정 이상 없이 추진 중임.

□ 계약기간내 공사 완료코자 추진에 만전을 기하고 있으며, 매일 추진공정 관리로 목표 달성에 차질없이 시행코자 함.

붙임 : 공사별 추진내역 1부. 끝.