보고서(급수공사연기)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
남상욱	김광운	08/28 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-22555

성동구 상수도공사 감독업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2015. 08. 28.

보고자 : 직  지방시설주사보   성명 : 남 상 욱

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2015년 성동구 상수도공사(장기계속단가계약)

연번	주 소	수요가명	공사기간	지시번호	비 고
1	*********************	************	2015.08.04. ~ 2015.08.31.	신설-23
2	*********************	************	2015.08.13. ~ 2015.08.31.	신설-27

□ 연기요청사항

연번	주 소	수요가명	연기 사유	공사연기 기간
1	*********************	************	학교측 음수대위치 변경 등 사유	2015.09.10
2	*********************	************	동부수도사업소 평일 작업불가(주말 9.5일 시행예정)	2015.09.10

□ 검토결과

○ 상기와 같은 사유상 공사연기로 인하여 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주 소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*********************	************	2015.08.04. ~ 2015.08.31.	2015.08.04. ~ 2015.09.10.
2	*********************	************	2015.08.13. ~ 2015.08.31.	2015.08.13. ~ 2015.09.10.

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨 부 : 현장실정보고서 1부(따로붙임).  끝.