문서번호	토목부-18014
결재일자	2015.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박상철		진재섭	08/29 노우성
협조

지하매설물에 대한 준공도면 작성 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

지하매설물에 대한 준공도면 작성 검토보고

(구리암사대교 연결도로 건설공사)

지하매설물 공사시행자는 공공측량을 실시하고 대한측량협회의 성과심사를 받아 준공도면 제출이 의무화되어 GIS DB 구축방안을 검토 보고드림

※관련근거 : 물재생계획과-15533(2013.12.05.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 연결도로 건설공사

○ 공사규모 : 도로개설 B=31.5m, L=1,880m

○ 공사기간 : 2012.8 ~ 2015.12

○ 도 급 비 : 18,242백만원

○ 시 공 사 : (주)신성건설 외 2개사

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1개사

□ 현   황

○ 종▪횡배수관 (D300~1500mm) : 3,607m

○ PC BOX (1.5×1.5 m) : 327m

Φ450, L=600m

Φ450, L=578m

Φ500, L=50m

Φ600, L=481m

Φ500, L=71m

Φ600, L=307m

Φ450, L=120m

Φ450, L=101m

Φ800, L=62m

[ 본선구간 ]

[ 강일삼거리 ]

고덕교

선사로

고덕차량기지

우수BOX (1.5×1.5)

L=327m

Φ600, L=50m

□ 관련규정

○ 도로법 시행규칙 제21조(준공도면의 제출 및 관리 등)

- 주요지하매설물 및 일반매설물의 설치공사를 시행한 자가 영 제33조에 따라 제출하는 준공도면(전자도면을 포함한다)에는 측량·수로조섬 치 지적에 관한 시행규칙 제21조에 따른 지하 매설물 현황을 제출하도록 되어 있음.

□ 검토내용

○ 공사비 검토

(금액단위 : 천원)

구 분	설계가	강제협의율 (90.202%)	낙찰율 (80.405%)	비 고
지하시설물 GIS DB 구축	33,891	30,500	27,250
공 급 가 액	33,891	30,500	27,250
부가가치세	3,389	3,050	2,725
도 급 액	37,280	33,550	29,975

□ 감리단 검토의견

○ 지하시설물 GIS DB 구축은 “도로법 시행규칙 제21조”에 의하여 구리암사대교연결도로건설공사의 공공하수도 시설에 대하여 GIS DB 구축을 설계에 반영함이 타당함.

○ 공공하수도 GIS DB 구축 공사비 산정을 위한 단가산출은 「건설공사 표준품셈 “지하시설물도 작성”」에 따른 신규단가로서 단가협의 결과에 따라 반영함이 타당함.

□ 공사시행 협의

○ 우리시 : 신규 공종에 대하여 낙찰율 80.405% 적용

○ 도급자 : 신규 공종에 대하여 100% 반영 요청

□ 조치의견

○ 상기 감리단 검토의견과 같이 승인하고 추후 설계변경시 정산 처리함이 타당하다고 사료됨

○ 금회 실정보고의 신규 공종에 대하여 공사 시행 협의 하였으나 협의가 되지 않아 부득이 신규 공종인 공공하수도 GIS DB 구축 설치에 대하여 공사계약일반조건 제20조2항에 따라 강제협의율(90.202%)을 적용코자 함.

- 개략공사비 : 증)34백만원

붙임 : 1. 책임감리원 검토의견서 1부.

2. 공사시행협의문서 2부.

3. 관련공문사본 1부.  끝.