내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 계약 요청

1. 물관리정책과-18130호(2014.12.2.)와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인 「서울특별시 지하수 관리계획 수립용역」과 관련하여 아래와 같이 설계변경 계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울특별시 지하수 관리계획 수립 용역

나. 계 약 자 : 한국지질자원연구원외 2

다. 계약기간 : ‘13. 5. 27.~ ’15. 1. 26.

(1차 : ‘13.5.27~ ‘14.3.26, 2차 : ‘14.3.27~ ‘15.1.26)

라. 계약금액 : 650,472,680원 (1차 : 339,338,940원, 2차 : 311,133,740원)

마. 변경사유 : ‘지하수 관련 지하굴착 기준 수립’ 관련 과업내용 추가

바. 변경내용

- 용역기간

구 분	당 초	변 경
총차 용역	‘13.5.27 ~ ’15.1.26	‘13.5.27 ~ ’15.6.30
2차 용역	‘14.3.27 ~ ‘15.1.26	‘14.3.27 ~ ‘15.6.30

- 용역금액

총차 용역 (단위 : 원)					2차 용역 (단위 : 원)
구 분		당 초	변 경	증·감	구 분		당 초	변 경	증·감
총용역비		650,472,680	764,068,010	증 113,595,330	총용역비		311,133,740	424,729,070	증 113,595,330
도급액	공급가액	625,454,500	739,049,830	증 113,595,330	도급액	공급가액	300,020,020	413,615,350	증 113,595,330
	부가가치세	25,018,180	25,018,180	-		부가가치세	11,113,720	11,113,720	-
	계	650,472,680	764,068,010	증 113,595,330		계	311,133,740	424,729,070	증 113,595,330

사. 예산과목 (2차용역)       ※ 1차 용역은 기 준공

- 물관리정책과, 깨끗한 물관리, 지하수 및 토양오염 관리, 서울시 지하수관리계획 수립(2차), 시설비 및 부대비, 시설비 (\311,133,740원)

- 물관리정책과, 치수 및 하천관리, 치수사업, 연구용역(재난관리기금 재난계정), 시설비 및 부대비, 시설비 (\113,595,330원)

따로붙임 : 1. 관련 방침서 2부.

2. 설계변경 내역서(총차, 2차) 각 1부.

3. 과업내용서(변경) 1부.

4. 설계변경 사유서 1부.

5. 합의각서 1부(별첨).  끝.

	물관리정책과장
주무관	박현우		물순환정책팀장	손경철		물관리정책과장	12/02 배광환
협조자
시행	물관리정책과-18177	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	02)2133-3761	/전송	02)2133-1041	/	hwpark5672@seoul.go.kr	/	부분공개(5)