문서번호	도로포장연구센터-1375
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
김태우		백종은	08/31 한민희
협조
	총무과장		이철형

「서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서 분석용역」

준공기한 연기 보고

2015.08

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

「서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서 분석용역」

준공기한 연기 보고

서울시도 3년주기 도로포장 표면상태 전수조사 중 1단계(‘14년도) 조사·분석 구간에 대하여 「서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서분석용역」을 추진하였으나, 분석업무기간이 추가로 필요하여 준공기한을 연기하고자 함

Ⅰ			관련근거

○ 지속가능한 도로포장연구센터 당면현안 및 발전방안 보고

【도로포장연구센터-565, 2015.04.03. 행정2부시장 방침 제 110호】

○ 도로포장상태 조사계획 보고 【도로관리과-2960호, ‘14.02.21】

○ 서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서 분석용역 보고 【도로포장연구센터-895, ‘15.06.08】

Ⅱ			사업개요

□ 계약내용

○ 계 약 명 : 서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서 분석 용역

○ 계약기간 : ′15.07.07~′15.09.03

○ 계약금액 : 1,985만원

○ 계약업체 : ㈜로드텍

○ 계약방법 : 소액 수의계약

□ 과업내용

○ 서울시 포장도로관리(PMS)체계 현황

○ 노선별, 도로기능별, 사업소별 포장품질등급(SPI) 현황분석

○ 최종 보수공법 및 보수 우선순위 결정

○ 투자예산분석 결과

○ 부록(조사분석 현황표 등)의 작성

○ 기타 제안사항

Ⅲ			추진내용

○ '15.07.07 : 기술용역 계약체결

○ '15.07.08 : 착수보고

○ '15.07.31 : 업무보고(1차)

○ '15.08.11 : 업무보고(2차)

○ '15.08.20 : 업무보고(3차)

Ⅳ			검토내용

□ 변경내용 : 준공기간 연기

구 분	기 존	변 경	비 고
계약금액	1,985만원	1,985만원	변경없음
용역기간	´15.07.07~´15.09.03	´15.07.07~´15.10.02	증 1개월

□ 변경사유

○ PMS 1단계 분석구간(2,468km) 중 시스템 상 일부구간(약 700km)에 대한 지도가 미구축되어 조사 자료가 누람됨

○ 이로 인하여 PMS 자동 통계분석 기능을 사용할 수 없어 통계분석을 위하여 추가적인 기간이 소요되어 준공 기간 연기가 필요함

Ⅴ			검토의견

□ 계약의 기본방침 변동없이 과업수행을 위한 공기연장에 해당되므로 제체상금은 발생하지 않으며, 준공기한을 연기하여 과업수행에 차질이 없도록 하고자 함

Ⅵ			행정사항

□ ´15.08.31 : 용역 계약 변경 의뢰

- 서울특별시 품질시험소 총무과

※붙임 :  합의각서 1부.

준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.