시민과 함께 하는 “서울브랜드” 아이디어 공모(7.20.- 9.1.)
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 도시고속도로 기능개선사업 예산 추가 재배정 시행(양재IC주변)

1. 동해종합기술공사 도로부-15-00444호(‘15.8.31), 교통운영과-4592호(’15.3.10.),  15648호(‘15.08.12.) 와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 2015년 도시고속도로 기능개선사업 대상지점인 “양재IC”에 대한 개선공사비를 산출하여 재배정하였으나, 사업시행부서인 남부도로사업소와 협의과정에서 아래와 같이 공사비 변경이 있어 추가 재배정하고자 합니다.

가. 대상지점 : 경부고속도로 양재IC 주변

나. 추가예산 : 76,139천원(시설비)

다. 변경사유 : 토사깍기, 사토량, 수량 재산정 등

라. 예산재배정 내역(교통사업특별회계)                           (단위:천원)

예산재배정			배정부서		누 계 배정액	기 배 정 액	금 회 배정액	비고
부서,정책,단위	세부사업	통계목
도시교통본부 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 도시고속도로 소통강화	도시고속도로 기능 개선	시설비 (401-01)	계		578,070	501,931	76,139
			남부 도로사업소	도로 보수과	578,070	501,931	76,139	양재IC주변 토목,폐기물등

첨 부 : 공사비 변경요청 공문(동해종합기술공사) 1부. 끝.

★주무관	임홍필		교통개선팀장	유승효		교통운영과장	08/31 강진동
협조자
시행	교통운영과-16822	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관1동 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2467	/전송	02-2133-1053	/	ihp@seoul.go.kr	/	대시민공개