문서번호	시설과-3777
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
토목시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
이용원	임병국	08/31 안해칠

- 경의선 숲길공원(2단계 1차) -

인수 관련 검토(조경시설)보고

2015. 08.

서부공원녹지사업소

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

경의선 숲길공원 인수 관련 검토(조경시설)보고

경의선 숲길공원 조성공사(2단계 1차) 완료에 따른 공원시설(조경시설 분야) 인수와 관련하여 검토하고 그 결과를 보고함

【근거 – 서울시 도시기반시설본부 방재시설부-10984호(2015.08.18)】

□ 공원조성 현황

○ 위  치 : 연남동, 염리동, 새창고개 등 3개소

○ 규  모 : 58,721㎡(연장 2.048㎞)

○ 주요시설물(조경시설분야) 내역

- 앉은벽 8개소 759.5m, 계단 침목계단등 4종, 생태측구 3개소,

- 브릿지 4개소, 마을 이야기설명판 3개소, 파고라 2개소, 등의자61개,

- 연식의자 77개소, 휀스 4개소 571m, 안내간판 17개소등

○ 시공사 : 한일개발(주) 대표 김명호, 우보건설(주) 대표 이홍준

□ 합동점검시 보완사항 조치내용(조경시설분야)

○ 다리형태의 철도침목으로 설치된구간 악취(기름냄새)발생 및 어린아이들이

넘어질 경우 손에 가시등이 밖힐 안전사고우려가 됨 → 그라인딩 작업완료

○ 녹지대 코너에 보호 목적으로 설치된 스테인레스의 시설물이 안전사고우려되므로      철거등 안전조치 요망 → 철거정비완료

○ 염리동구간에 설치된 수조 가장자리(테두리) 날카로운부분 안전사고 발생우려

되므로 대책강구 요망 →  모서리 부분 그라운딩처리 완료 및 물놀이 금지안내       표지판 설치되어 있음. 추후 조지예정 임

○ 산책로 매끄러운 콘크리트로 시설되어 있는 부분 겨울철 미끄러워 안전사고

우려되므로 대책강구 및 보완요청 → 콘크리트 포장은 거친표면 마감으로

위험성없음.

□ 보고자 의견

○ 우리사업소에서 인수인계관련 조경시설물 점검하여 지적한 사항에 대하여는 상기와 같이 발주처에서 보완 하였으나, 일부 즉시처리가 불가능하거나, 설계대로 시공되어 교체정비가 어려운 사항은 공원시설물 유지관리를 하면서 보완하여야 할 것으로 사료되므로 우선 인계·인수받아 공원시설물(조경) 유지관리를 하고자 함.

○ 기타 조경시설물의 설치와 수량은 설계도면과 일치 함.

□ 행정사항(유지관련/조경시설)

○ 경의선 숲길공원 조경분야 인계·인수 후 유지관리계획

- 조경시설물(의자, 파고라 등)의 일상적인 유지관리 → 공원운영과

- 조경시설물이 파손되거나, 교체정비가 필요한사항 → 시설과

- 일상적인 점검등 관리 → 공원운영과

- 정기적인 조경시설물 점검 등 → 시설과

붙  임  1. 시설물 점검시 지적사항 보고서 1부.  끝.