투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	금천구청장(치수과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 [시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사 관련 교통신호기 설치공사]

1. 금천구청 치수과-3084호(2015.08.26.), 남부도로사업소 기전과-4336호(2014.09.24.)와 관련입니다.

2. 금천구 시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구) 관련 교통안전시설물설치 원인자부담공사의 공사기간 변경을 아래와 같이 승인하오니 교통사고 예방 및 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 금천구 시흥저지배수분구 하수관거 종합정비공사(1공구)

중 교통안전시설물 설치공사

나. 공사기간

- 당초 : 2014.09.22 ~ 2015.05.31

- 변경 : 2014.09.22 ~ 2015.11.30

다. 변경사유 : 연계공사 지연

라. 공사장소 : 금천구 시흥대로 192앞

마. 원 인 자 : 금천구청 치수과

바. 공사관리번호 : 신호 2014-0201-053

사. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
신호기	㈜트래픽스	㈜트래픽스	㈜창희이엔에스	교통신호기설치공사 1식

3. 공사완료후 7일 이내에 준공요청 공문과 준공서류(감리경유)를 제출하여 주시기 바랍니다.(준공관련 도면, 준공사진, 기타 관련서류 등 CD포함 이메일 발송) 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	박종근		기전과장	08/31 유재옥
협조자	주무관	허송욱
시행	기전과-4002	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3284-5458	/전송	02)3284-5470	/		/	대시민공개