투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	(주)의천건설 대표 조계형
(경유)
제목	실정보고 승인통보

1. UCKM-150-08-002(2015.8.31)호와 관련입니다.

2. 시설개선과-5323(2015.6.24)호, 제15차 작업지시 건에 대한 귀사의 공사기한 연기요청에 대하여 승인하니, 공사진행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 2015년 시설물유지보수공사(연간단가계약)

2) 도 급 자 : 의천건설(주) 대표 조계형

3) 도급금액 : 912,111,990원

4) 공사기간 : 2015.03.09 ~ 2015.12.30

나. 실정보고 승인내용

구 분	작업지시(보수) 내용	작업기한		연장사유	비 고
		당초	변경
제2수영장	· 제15차 작업지시 - 2014년 정밀점검 및 정기점검 지적사항 보수	2015.8.30	2015.9.20	사업소 시행 지붕트러스 정밀안전진단 용역 진행으로 인한 공사중지로 절대공기 부족	공사기한 20일 연기

덧붙임  실정보고서 1부.  끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
★주무관	오상호		시설개선과장	08/31 신동호
협조자	주무관	김태욱		주무관	이상욱
시행	시설개선과-7341	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 (잠실동 10번지)	/
전화	02-2240-8818	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개