투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	총 무 과 장
(경유)
제목	서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서분석 용역 준공기한 연기 요청

우리부서에서 추진중인 “서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서분석용역”의 준공기한을 아래와 같이 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

○ 계 약 명 : 서울시 도로포장 표면상태 조사 1단계 결과 보고서 분석용역

○ 계약기간 : ´15.07.07~´15.09.03

○ 계약금액 : 1,985만원

○ 계약업체 : ㈜로드텍

나. 요청내용 : 준공기한 연기

○ 변경내용 : 당초´15.07.07~´15.09.03→변경´15.07.07~´15.10.02(증1개월)

○ 변경사유

- PMS 1단계 분석구간(2,468km) 중 시스템 상 일부구간(약700km)에 대한 지도가 미구축되어 조사 자료가 누락됨

- 이로 인하여 PMS 자동 통계분석 기능을 사용할 수 없어 통계 분석을 위하여 추가적인 기간이 소요되어 준공 기간 연기가 필요함

○ 검토의견

- 계약의 기본방침 변동없이 과업수행을 위한 공기연장에 해당되므로 제체상금은 발생하지 않으며, 준공기한을 연기하여 과업수행에 차질이 없도록 하고자 함

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	도로포장연구센터장
주무관	김태우		도로포장연구센터장	08/31 백종은
협조자
시행	도로포장연구센터-1379	(		)	접수		(		)
우	06763	서울시 서초구 태봉로 131 서울특별시 품질시험소 도로포장연구센터	/
전화		/전송	02-3462-6710	/		/	대시민공개