문서번호	토목부-18121
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	08/31 노우성
협조

보강토 옹벽 설치수량 변경등 검토보고

(서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

2015. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

보강토 옹벽 설치수량 변경등 검토보고

(서빙고고가교 및 강변북로 연결로 개선공사)

본공사 시·종점부 불필요한 보강토 옹벽 설치수량 변경 및 설계서 오류와 당초 설계에 누락된 L형 옹벽 및 연석설치에 대한 검토보고임

1		관련근거

❍ 토목부-152호(2012. 1. 5.) 설계도서 검토결과

❍ 한종(서빙고) 제15-157호(2015. 8. 20.) 실정보고

2		공사개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존고가 철가 : B=16m, L=510m

- 고가설치 : B=6.4, L=115m / B=10.4, L=290m

❍ 공사기간 : 총괄 2011. 1. 6. ∼ 2015.12.31.(5차 2015. 3. 2. ~ 2015.12.31.)

❍ 도 급 비 : 총괄 20,221백만원(5차 7,893백만원)

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술 외 1    ❍ 시 공 사 : 주식회사 흥화 외 1

3		감리단 보고내용

① 보강토 옹벽 설치수량 변경

❍ 변경사유

- 보강토 옹벽 설치구간중 시·종점부 일부구간은 원지반에서 –0.79~-2.34m          터파기후 보강토 옹벽을 시공토록 돼 있어 과다하게 지중으로 매입되어 상부         L형옹벽으로 대체가 가능함으로 보강토 옹벽 설치수량 감이 필요함

❍ 현황 및 변경계획

- 당초 설치계획

구분	횡단면도
	두무개길(STA.0+00)	강변북로(STA.0+740)
	철도측	철도측

- 변경 설치계획

구분	횡단면도
	두무개길(STA.0+00)	강변북로(STA.0+20)
	철도측	철도측

- 변경 설치수량

구 간		당초(m)	변경(m)	증·감	비고
두무개길	좌측	122.76	99.675	-23.085
	우측	104.57	105.975	1.405
	소계	227.33	205.65	-21.68
강변북로	좌측	89.19	69.24	-19.95
	우측	89.97	89.19	0
	소계	179.16	158.43	-19.95
합계		406.49	364.08	-41.63

② L형옹벽 설치수량 변경 및 문양거푸집 추가, 규격 변경

❍ 변경사유

- L형 옹벽 설계서 오류(도면과 물량내역서 상이) 반영 필요

- L형 옹벽 배면부 노출 콘크리트 미관개선을 위해 무늬 거푸집 반영

-  L형 옹벽 상단의  폭을 500→450mm로 변경하여 신설교량 본선부와의

선형 일체성 확보 필요

❍ 현황 및 변경계획

- L형 옹벽 설치수량 변경

구 간		당초(m)	변경(m)	증·감	비고
두무개길	좌측	122.76	118.55	-4.21
	우측	104.57	120.43	15.86
	소계	227.33	238.98	11.65
강변북로	좌측	89.19	97.65	8.46
	우측	89.97	159.07	69.10
	소계	179.16	256.72	77.56
합계		406.49	495.7	89.21

- L형 문양거푸집 변경

당 초	변 경

- L형 옹벽 규격 변경(기술지원감리원 구조검토시 적정)

당 초	변 경

③ 연석 추가 설치

❍ 추가사유

- 보강토 옹벽구간 연석이 설계서에 누락되어 있어 추가 반영이 필요

❍ 현황 및 변경계획

- 단면도

당 초	변 경

❍ 추가설치 수량

구 분	단위	두무개길		강변북로		합 계		증·감	비고
		당초	변경	당초	변경	당초	변경
연 장	m	604	835	252	497	856	1,332	476

④ 적용단가 검토 및 공사비 증·감 현황

❍ 적용단가 검토

- L형 옹벽 : 설계가에서 공종별 낙찰율(65.38%) 적용

- 조인트/스티로폼 : 낙찰율(81.57%) 적용

❍ 공사비 증·감 현황

공 종 명	규격	수 량			공사비(천원)			비고
		당 초	변 경	증ㆍ감	당 초	변 경	증ㆍ감
토공					245,453	252,815	7,362
1.01 흙깍기	㎥	3,613	4,201	588	2,070	2,407	337
1.03 사토운반	㎥	5,899	6,705	806	126,865	136,364	9,499
1.04 순성토운반	㎥	9,004	8,795	-209	111,704	109,111	-2,593
1.05 흙쌓기	㎥	4,596	4,555	-41	4,750	4,660	-90
1.06 노상준비공	㎥	242	1,030	788	64	273	209
3. 구조물공				0	313,407	268,509	-44,898
A. Steel Box교				0	13,174	37,000	23,826
3.04 거푸집	㎡	428	667	239	5,621	8,759	3,138
a. 무늬거푸집	㎡	210	706	496	3,355	11,281	7,926
3.05 강관비계	㎡	0	1,261	1,261	0	8,124	8,124
3.07 철근가공조립	ton	16	36	20	3,582	7,857	4,275
3.08 콘크리트타설	㎥	89	140	51	616	969	353
3.09 수축줄눈	㎡	0	11	11	0	10	10
B. 블록식옹벽공					300,233	231,509	-68,724
3.01 터파기	㎥	977	947	-30	912	802	-110
3.02 블럭쌓기	㎡	1,826	1,232	-594	272,489	205,654	-66,835
3.03 L형옹벽	m	407	496	89	26,832	25,017	-1,815
3.05 조인트/스티로폼	㎡	0	24	24	0	36	36
직접공사비					558,860	521,324	-37,536
제 경 비					163,693	154,652	-9,041
물가변동					59,064	53,122	-5,942
공급가액					781,617	729,098	-52,519
부가가치세					78,162	72,910	-5,252
도 급 액					859,779	802,008	-57,771
관급자재					17,019	95,060	78,041
총공사비					876,798	897,068	20,270

4		검토의견 및 조치의견

❍ 보강토옹벽 수량 변경 및 L형 옹벽 수량변경(문양거푸집, 규격포함), 연석 추가설치에        대한 감리단 검토내용이 적정한 것으로 판단되며, 향후 설계변경시 반영 조치하고자 함

붙  임 : 감리 검토의견서 1부.  끝.