문서번호	전시과-3056
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	전시과장	학예연구부장	서울역사박물관장
정수인	代김양균	박현욱	08/31 강홍빈
협 조
	경영지원부장		박형중
	시설과장		국중연
	총무과장		代김기용

상설전시실 경희궁 모형 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.   8.   .

서울역사박물관

(전시과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

상설전시실 경희궁 모형 설치 계획

조선시대 경희궁 복원모형을 제작하여 상설전시실 1존의 경희궁 콘텐츠를 보강하고 현재의 서울역사박물관 모형을 제작하여 관람객에서 박물관 공간구조를 조망할 수 있도록 함.

Ⅰ		사업 개요

□ 개  요

○ 사 업 명 : 경희궁 복원 및 서울역사박물관 모형제작 및 설치

○ 사업기간 : 2015. 9 ～ 11

○ 투입예산 : 48,000천원

○ 사업장소 : 서울역사박물관 상설전시 1존 및 로비

○ 사업내용 : 조선시대 경희궁 복원 모형 및 서울역사박물관 모형 2점

□ 추진방향

○ 서궐도와 의궤를 바탕으로 조선시대 경희궁 복원 모형 제작

○ 상설전시실 1존 경희궁 코너 콘텐츠 보강에 기여

○ 서울역사박물관 및 주변지역이 포함된 모형을 제작하여, 관람객에게 박물관 공간구성 설명에 도움

□ 모형 및 사업 개요

○ 제작규모 : 214*162(cm), 1/300

○ 제작모형 : 조선시대 경희궁 모형/ 현재 서울역사박물관 모형

○ 제작범위

― 조선시대 경희궁 권역을 포함하는 서울역사박물관, 신문로주택, 성곡미술관, 서울시교육청, 기상청 등

○ 모형설치 : 상설전시실 1존 및 로비

복원 경희궁

현재 서울역사박물관과 주변

Ⅱ		추진 계획

□ 제작도면 작성

1) 복원 경희궁

○ 기본도면 : 경희궁지종합정비계획에 실린 복원도면 활용

○ 모형제작도면 : 의궤 및 궁중기록화 등을 통해 전각입면 및 형태 검토

2) 현재 서울역사박물관

○ 현재의 도시 및 건축조사, 박물관과 주변현황을 표시

□ 모형 설치

○ 상설전시실 1존 경희궁 코너 및 입구 로비 부근에 모형 설치

Ⅲ		예 산

□ 필요예산 : 총 48,000천원

○ 예산항목 - 서울역사박물관, 역사와문화의복합공간창조, 시민의이용도증가, 상설전시실유지운영, 시설비 및 부대비, 시설비

구 분	예산액(천원)	예산과목
경희궁 복원모형 제작 및 설치	48,000	시설비
서울역사박물관 모형 제작 및 설치
총 계	48,000

Ⅳ		추진 일정

○ 2015. 9. 1~2주.	발주 및 계약

○ 2015. 9. 3주. ~ 10. 2주. 제작도면 작성 및 샘플 모형 검토

○ 2015. 10. 3주 ~ 11. 2주. 모형 제작

○ 2015. 11. 3주 모형 설치

Ⅴ		성과 지표

□ 12. 관람 환경의 적정성

□ 13. 고객만족도

□ 18. 전시기획 및 운영