문서번호	교통운영과-16762
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관	교통개선팀장		교통운영과장		보행친화기획관		도시교통본부장
임홍필	유승효		강진동		김용남		08/31 신용목
협 조

위례택지개발사업관련

장지동길 교통체계 개선사업 추진계획 보고

2015. 8

도시교통본부

(교통운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

장지동길 교통체계개선 사업 추진계획

위례택지재발사업과 관련하여 위례신도시 입주민들의 불편을 최소화하기 위한 광역교통개선대책의 일환인 “장지동길 교통체계개선사업”의 향후 추진계획을 보고함

□ 추진근거

○ 대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 제7조의2

○ 위례택지개발사업 광역교통개선대책 변경(안)(국토교통부 심의 제47호(‘14.4))

※장지동길 TSM사업의 재원부담주체는 사업시행자(LH공사/SH공사), 시행주체는 서울시

□ 추진경위

○ ‘08. 02.   : 송파거여지구 택지개발사업 광역교통개선대책(안)(건설교통부심의 제108호)

○ ‘14. 04.   : 위례택지개발사업 광역교통개선대책 변경(안)(국토교통부심의 제47호)

○ ‘15.01.12 : 위례 광역교통개선대책 적기추진 요청(LH공사→시)

- 광역교통개선대책을 ‘17년 이전까지 완료 요청

○ ‘15.02.27 : 장지동길 도로신설 사업관련 협의 (시→SH공사)

○ ‘15.03.11 : 위례신도시 광역교통개선대책관련 주민협의 회의 개최

- 회의내용 : 각 사업별 추진현황, 문제점 및 개선방안 보고 등

○ ‘15.06.08 : 장지동길 도로 신설 사업추진 계획 요청(시→SH공사)

○ ‘15.06.12 : 장지동길 도로 신설 사업추진 계획 회신(SH공사→시)

- ‘16.12월 장지동길 도로신설 공사 착공 예정

□ 장지동길 교통체계 개선사업 개요

○  위    치 : 서울시 송파구 송파동 한양공원 ~ 송파파인타운 1단지 주변

○  규    모 : 교통체계개선 폭4차로, 연장2.6km

○  사업기간 : 2016. 1월 ~ 2017. 12월

○  사업내용 : 위례신도시 광역교통개선대책과 관련한 장지동길 도로의 교통영향 분석

신호체계 개선(좌회전 신설, 유턴 허용 등) 및 안전시설 설치 등

○  총사업비 : 20억원

□ 사업시행 방안 검토

○ 기본 및 실시설계 용역 시행

- 위례택지개발 사업에 따라 인구유입으로 인한 교통량 조사 등을 통해 문제점을 도출하고 교통량 분산 등 교통체계개선 방안을 수립하여 인근 가로체계에 미칠 영향을 최소화하여 교통처리를 원활하게 하기 위해서는 용역 수행 필요

- 소요예산 : 115백만원(용역비)

○ 공사시행

- 장지동길 교통체계개선사업은 SH공사에서 추진하고 있는 “장지동길 도로 신설” 사업과 상호 연계하여 추진

※ 장지동길 도로신설 사업 현황

· 시행주체 : SH공사

· 규    모 : 4차로, 0.4km (장지동길과 위례신도시의 단절된 구간 연결)

· 사업기간 : 2006.7 ~ 2018.12

· 사 업 비 : 380억원

□ 향후 추진계획

○ ‘16.  1월 : 기술용역 타당성 심사 및 용역 발주

○ ‘17.  1월 : 공사 계약 및 착수

○ ‘17. 12월 : 교통체계개선 공사 완료

첨 부 : 1. 위례택지 개발 변경심의안 1부.

2. 위례택지 개발 광역교통개선안 1부. 끝.