문서번호	도시철도설비부-8943
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
박종회		추경수	09/01 정찬웅
협 조
	토목1과장			김성호
	설비계획과장			강재천

노량진역 환승통로 완공예정에 따른

개통일정 검토 보고

2015. 9

도 시 철 도 국

(도시철도설비부)

노량진역 환승통로 완공예정에 따른

개통일정 검토 보고

노량진정거장 환승통로 시설공사 완공시기가 도래함에 따라 그간 임시환승체계를 정상환승체계로 변경 운용하는 개통일정을 검토하고 보고드림

사업개요

○ 사업내용 : 노량진역 환승통로 건설사업

○ 운영기관 : 한국철도공사

○ 사업기간 : 2009.12.16.~2015.9.30

○ 공 사 비 : 194억원

○ 사업효과 : 노량진역 국철1호선과 지하철 9호선간 환승편의를 제공하고 그간 단절되었던 정기권 및 1회권 환승 연계

건설현황

○ 캐노피연장 및 대합실 건축마감 공정 진행중으로 9월말 완공예정임

○ 서울시메트로9호선(주) 환승게이트 11대 설치 완료

※ 건설공사는 9월말 완공예정이나 사인보드, 광고판 설치, 운영기관 합동점검 등 일부 잔여공정이 남아 운영가능 시기는 10월로 예상

개통일정 검토

○ 환승통로 개통에 따른 수도권 교통사업자 협의 및 S/W 변경

- 임시환승에서 정상환승체계 전환은 그간 단절되었던 1회권 및 정기권 처리 등 수도권 전체 철도운영기관 운임 테이블과 S/W 변경 필요

- 이에 따라 개통일정은 교통정책과에서 주관하는 ‘수도권 교통카드시스템 개선회의’에 안건을 상정하여 교통사업자간 일정 등을 협의

○ 요금징수설비 S/W 변경은 수도권 전 운영기관에서 동시에 수행하며 S/W개발(4주), 단말기 배포(4주) 등 총 8주의 준비기간 소요

※ 현재 계획된 수도권 광역철도 개통(변경) 일정

- 경의선 야당역 신설 및 용산선 효창역 역명개정 : 10. 31(토) 예정

도시교통본부 협의내용

○ 교통정책과와 개통일정 협의 결과 공사일정, 타기관 변경사항 등을 감안하여 개통일정은 10.31(토)가 타당하다는 의견

○ ‘수도권 교통카드시스템 개선회의’에 안건으로 상정 요청키로 협의

조치계획

○ 건설공사 완공과 잔여공정 등을 감안하여 10.31(토) 개통에 문제가 없을 것으로 사료되며

○ 도시교통본부에서 주관하는 ‘교통카드시스템 개선회의’에 타기관 변경사항과 동시에 상정하여 협의토록 하여 노량진환승통로 개통 추진하고자 함

※ ‘15.9.3(목) 수도권 교통카드시스템 개선회의 실시예정

따로붙임 : 상정안건 자료 1부.  끝.