문서번호	시설보수과-6833
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	09/01 조병준
협조

추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획

우리 민족 고유의 명절인 추석을 맞이하여 소관 도로시설물에 대하여

시민생활 불편사항을 최소화하고, 안전한 귀성․귀경길이 되도록 추석 대비

도로시설물 안전점검 계획을 수립ㆍ시행하고자 함

Ⅰ		현 황

관련근거

도로시설과-50호(2015.8.31) : 도로시설물 순찰 및 정비계획

건설안전과-12577호(2015.8.27) : 특정관리대상시설 일제조사 계획 알림

시설보수과-3993호(2015.5.28) : 특정관리시설등 안전점검(정비) 계획보고

대상 시설물현황 (57개 시설물)

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	I.C	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비고
계	57	17	8	6	5	17	4
1 종	7	-	-	-	4	2	1
2 종	23	7	5	2	1	8
법 외	27	10	3	4	-	7	3

※ 선유교(보도교)는 일반교량에 포함됨

※ 서부트력터미널앞지하차도는 도기본에서 입수인계완료 이후 점검 시행

Ⅱ		점검 계획

점검기간 : 2015. 9. 7(월) ~ 2015. 9. 22(화) 15일간

※ 추석연휴 : 9. 26(토) ~ 9.29(화) 4일간,  추석 9. 27(일), 대체휴무 9.29(화)

점검방법

시설물 담당자 포함 2인 1조로 시민 이동에 따른 안전확보를 위한 순찰 위주 맞춤형 점검 시행

점검조 편성

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 유태용, 토목운영7급 조정갑
2 조	시설6급 윤동원, 토목운영7급 조정갑
3 조	시설7급 김규춘, 토목7급 김승진

담당자별 시설물 현황

직 명	성 명	담 당 시 설 물
시설6급 (토 목)	유태용 (12)	목동교(2종․B), 안양교(2종․C), 선유교(법외․A), 개봉철도고가(2종․B), 화곡고가(법외․B), 신월IC(법외․B), 오류IC(법외․B), 시흥IC(법외․B), 작동터널(1종․B), 국회앞지하차도(2종․B), 등촌지하차도(2종․B), 목동교서측지하차도(법외․B)
시설6급 (토 목)	윤동원 (12)	서울교(2종․B), 고척교(2종․B), 광명교(법외․B), 개봉교(법외․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B), 개화교(법외․A), 개봉고가(2종․B), 궁동터널(1종․B), 생태터널(1종․A), 오목교서측지하차도(법외․B), 개화천복개(법외․B)
시설7급 (토 목)	김규춘 (12)	오목교(2종․B), 오금교(2종․B), 여의2교(2종․C), 광복교(법외․B), (구로)도림교(법외․B), 가리봉철도고가(2종․C), 개화IC(법외․B), 공단IC(2종,B), 구로역지하차도(법외․B), 신도림지하차도(2종․B), 도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(법외․B)
시설7급 (토 목)	김승진 (12)	구로1교(법외․B), 구로고가(2종․B), 가마산고가(법외․B), 오류철도고가(법외․B), 영등포R. IC(2종․B), 화곡터널(2종․ B), 가마산지하차도(2종․B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B), 서부트럭터미널앞 지하차도(1종․A), 외발산지하차도(1종․B), 고척2지하차도(법외․B)
토목운영주사보	조정갑 (9)	역곡천교(법외, A), 신정교접속교(법외, B), 범박터널(1종, A), 오목지하차도(2종․B), 오금지하차도(2종․B), 서울교접속지하차도(법외․B), 성산지하차도(법외․B), 구로지하차도(2종․B), 염창IC하부복개(법외․B)

주요 점검 착안사항

구 분	주요 점검사항
교량 및 고가	- 신축이음부 퇴적 및 배수시설 상태, 도로부속시설물 손상 등
터널 및 지하차도	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상여부, 배수로 막힘, 타일탈락 등
복개구조물	- 구조물 누수, 하상 토사적치 및 기초하부 세굴여부 등
기타사항	- 구조물 누수, 외부인 출입통제시설 관리상태 등 - 시설물하부 화재발생요인 방치여부 - 도로표지판, 교통안전시설 파손 여부 등

※ 첨부한 시설물 부재별 점검매뉴얼 활용 안전점검 시행

Ⅲ		점검 결과 조치

조치기간 : 2015.9. 15(화) ~ 2015. 9.22(화)  7일간

조치계획

- 지적사항은 즉시 보수하여 추석전 조치 완료 원칙

- 즉시 보수가 어려운 사항은 별도 보수계획 수립, 이상여부 수시 확인

- 구조안전에 영향을 주는 사항은 별도의 보강 정비계획을 수립 추진

지적사항에 대한 조치결과를 ’15.9.23(수)한 도로시설과로 제출(양식1,2)

특정관리시설 조사결과 중앙안전관리시스템(FMS) 및 NDMS 입력(12.4)

붙임 : 1. 점검결과 집계표(양식1)

2. 안전점검 보고서(양식2)

3. 시설물 부재별 점검사항.   끝.