문서번호	기반시설과-755
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
곽영만		한흥태	09/01 박상돈
협조
	★주무관		조운행

-당산동~샛강생태공원간 보행육교 설치공사-

지장수목 이설 실정보고사항 검토결과 보고

2015. 09.

시  설  부

기반시설과

- 당산동 ~ 샛강생태공원간 보행육교 설치공사 -

지장수목 이설 실정보고사항 검토결과 보고

당산동 ∼ 샛강생태공원간 보행육교 설치공사에 저촉되는 지장수목 이설수량 확인결과 설계에 반영된 수량과 상이함에 따라 이설 수량변경 승인요청에 대한 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 당산동 ~ 샛강생태공원간 보행육교 설치공사

○ 공사위치 : 영등포구 당산동 ~ 여의샛강생태공원 자전거도로

○ 공사규모 : 보행육교(폭 5m, 연장 139m) 승강기 2대(20인용)

○ 공사기간 : ‘15.06.19 ~ ’16.04.13(10개월)

○ 시공 및 감리사 : 시공 - ㈜오이코스, 감리 - 산하종합기술㈜, ㈜한국건설관리공사

○ 소요예산 : 6,128백만원(공사 5,524. 감리 385. 전기 219)

□ 실정보고 내용

○ 관련문서 : 샛강(감)제2015-32호(2015.08.21)

○ 실정보고 내용

- 경과조치 : 지장수목 관련기관 및 지역주민과 협의 이식 완료

관 련 기 관	수목 이식 협의 · 조치	비 고
한강사업본부	о 교목(당산역 하부 녹지대 이식) 관목(노들길 노견 하부)
서울시 도로시설과	о 서울시 시설관리공단 녹지대 이식 L = 2km
지역주민	о P1부 왕벚나무, 스트로브잣나무 기존 녹지대에 이식

○ 조경수목 현황

구 분	설 계	조 사 결 과	비 고
지장수목	о 교 목 : 12주 · 버즘나무 : 4주 · 느티나무 : 3주 · 스트로브잣나무 : 3주 · 버드나무 : 2주 о 관 목 : - о 임목폐기물 처리 : -	о 교 목 : 21주 · 버즘나무 : 3주 · 산 수 유 : 3주 · 스트로브잣나무 : 3주 · 왕벚나무 : 2주 · 팽 나 무 : 10주 о 관 목 : 604주 о 임목폐기물 처리 : 18주

○ 개략 공사비 증·(감) 대비표

공 종	당 초		당 초		공 사 비 증·(감)	비 고
	편입지장물	공사비	편입지장물	공사비
지장수목	59,500,000원 (수목이식 12,000,000원)	-	59,500,000원	19,327,000원	증 19,327,000원

○ 건설사업관리자 검토 결과

- 공사에 간섭되는 수목 이설을 위하여 관련기관과 이설 협의 및 수량

확인 결과 시공사에서 승인 요청한 지장수목 이설 실정보고는 검토결과

적정하다고 사료됨.

□ 기타사항

○ P3 공구 우회도로 개설에 따른 지장수목 처리 필요

- 지장수목 현황(설계회사 조사)

구분	수 종	규격	수량	구분	수 종	규격	수량
이식	팽나무	R=52	1	제거	팽나무	R=14	2
		R=14	1		버드나무	R=14	2
		R=12	1			R=42	1
	물푸레나무	R=10	1		버즘나무	R=14	1
소 계			4			R=25	2
제거	팽나무	R=8	4			R=30	1
		R=10	7			R=46	1
		R=12	1	소 계			22

□ 검토 및 조치의견

○ 보행육교 설치의 지장수목을 이식하는 실정보고로 사업의 원활을

위하여 기 이식 조치하였음.

○ 낙찰차액을 활용하는 계획으로 실정보고 하였으나, 당초예산(편

입지장물이설)을 활용토록 하고,

○ P3 공구의 임시도로 개설에 따른 지장수목의 이식 및 제거로 올

림픽도로의 녹지가 절단되어 시각적으로 미관을 저해하고 있어

P2 공구내에서 이식한 팽나무 2주(R=38, R=28cm)와, P3 공구에서

이식한 팽나무 1주(R=14cm)을 재이식하여 녹지을 연결하고자 함.

○ 위 사항에 대하여 감리단에 통보하여 설계변경토록 지시하고자

함.

붙임 : 1. 감리단 실정보고서 1부(따로붙임).

2. 현황사진 1부.  끝.