문서번호	산지방재과-9299
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		사면정비팀장	산지방재과장
김계영		정상모	09/01 김영수
협조

우면산 산사태 복구공사 하자조사 계획

(2015년 하반기)

푸른도시국

(산지방재과)

우면산 산사태 복구공사 하자조사 계획

우면산 산사태 복구공사(1~3공구)에 대한 2015 하반기 하자조사를 실시하고 시공사에 하자발생사항을 통보ㆍ조치코자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 우면산 산사태 복구공사(1~3공구)

○ 공사기간 : 2011.12.22 ~ 2012.12.14

○ 사업내역

구분	위 치	규 모	공사비 (단위:천원)	시공사
계		38.9ha	19,468,615	산림조합중앙회
1공구	래미안, 임광아파트 앞, 전원마을	17.1ha	8,514,105	동부산림경영센터 (강릉)
2공구	신동아아파트 앞, 보덕사	13.8ha	7,509,032	북부산림경영센터 (홍천)
3공구	생태연못, 형촌마을	8ha	3,445,478	남부산림경영센터 (안동)

○ 감 리 사 : 숲산사산림기술사사무소

○ 설 계 사 : 산림조합중앙회 엔지니어링사업본부

○ 하자기간 : 준공검사일로부터 공종별 2~7년

공 종 별	하자보증년수
	1공구 (2012.12.14 준공)	2공구 (2012.10.24 준공)	3공구 (2012.10.31 준공)
Con'c사방댐, 역T형, 중력식	'12.12.28~'19.12.27(7년)	'12.10.24~'17.10.23(5년)	'12.11.01~'19.10.31(7년)
구조물공	'12.12.28~'17.12.27(5년)	'12.10.24~'17.10.23(5년)	'12.11.01~'17.10.31(5년)
조 경 공	'12.12.28~'14.12.27(2년)	'12.10.24~'14.10.23(2년)	'12.11.01~'14.10.31(2년)

※ 조경공은 하자보증년수(2년, ’14년 12월) 경과되어 제외

□ 하자조사계획

○ 조사기간 : 2015. 9. 1 ~ 9. 18

○ 조사내용 : 공종별 하자수량 및 내용 현장점검

- 사방시설물 변형 및 파손 여부, 배수시설의 배수기능 유지 여부

- 구조물의 기능성, 주변부 세굴가능성, 마감부 및 이음새 등 하자여부

- 옹벽,석축 파손, 손상, 균열 발생 여부 등

○ 조사방법 : 공구별 점검자가 시행

공구별	1공구	2공구	3공구
점검자	시설5급 정상모 시설6급 유진석	녹지6급 김계영 시설9급 김세준	녹지6급 김계영 시설9급 김세준

○ 추진일정

- ‘15.09.01 ~ 09.18 : 공구별 하자조사

- ‘15.09.21 ~ 09.23 : 하자통보 및 착수

- ‘15.09.24 ~ 10.30 : 하자조치 및 준공.

□ 행정사항

○ 공구별 점검자가 하자발생시설에 대하여 시공사에 하자보수 통보

및 조치.  끝.