문서번호	녹색에너지과-17609
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	전력관리팀장	녹색에너지과장
박상현	조성태	09/01 권민

주택용 발전보일러(m-CHP) 관련  경동나비엔 생산공장 방문 결과보고

2015. 8.

기후환경본부

(녹색에너지과)

경동나비엔 생산공장 방문 결과보고

현재 어린이집 등에 시범 보급되고 있는 전기를 생산하는 스털링엔지 탑재 보일러의 생산 공장을 방문하고 그 결과를 보고드림.

□ 방문개요

○ 일    시 : '15. 8. 28(금) 14:00~18:00

○ 장    소 : 경동나비엔 보일러 생산 공장(오산)

○ 참    석

- 전력관리팀장, 함진각, 박상현

- 경동나비엔 생산본부장 김두식, 김성갑 팁장 등 관계자 4명

○ 방문목적 : 스털링엔진 조립 생산라인 견학 및 생산,보급 일정 점검

□ 주요내용

○ 스털링엔진 조립 과정 견학

- 스털링엔진을 조립하고 테스트를 거쳐 완제품 나오는 과정 견학

- 스털링엔진의 전기 생산과정 및 폐열회수에 의한 보일러 효율 증대에 대한 원리 설명

○ 발전보일러 보급확대에 대한 논의

- 단가 절감을 위해 회사 자체적으로 수요처를 발굴하여 보급확대에 노력해야 함.

→ 가격 경쟁력확보를 위해 수요처 발굴과 부품단가 절감에 지속적으로 노력하고 있음

○ 현재 진행중인 어린이집 시범보급사업 관련 점검

- 스털링엔진 반입 및 조립현황

반입일자	수량(대)	조립여부	현장설치	시운전완료
8월 이전	3	조립완료	설치완료
8.26	6	“
9.02	6
9.09	12
9.18	13
계	40

- 보일러 현장설치가 당초일정보다 지연되었으므로 10월초 완료가 되도록 스털링엔진 전량을 반입할 필요가 있음.

→ 엔진 제조사가 스털링엔진을 소량으로 제조하고 있으며, 현재 보급일정은 여러차례 조율로 납품일정에 더 이상 차질이 없음

- 일부 설치장소에서 배관 재시공 등 과다 요구시 수용이 어려운 경우 장소 변경이 가능한지(경동나비엔)

→ 어린이집에서 사전에 약속된 보일러 설치 범위 이상의 공사를 요구하는 경우 서울시에 연락하고 추가조치를 받을 것. 서울시에서 상담하고 계속진행이 어려운 경우 설치장소를 변경하겠음.

□ 향후일정

○ 09월 말 : 31대 설치(77.5%) 완료

○ 10월 말 : 잔량 6대 설치 100완료.

○ 11월 초 : 사업비 지급 및 모니터링 실시

○ 11월 말 : 자산관리부서(자치구)로 관리전환

첨부 : 현장방문 사진 1부.  끝.

경동나비엔 발전보일러 생산라인 방문사진

전기발전보일러 양산라인 전경

스털링엔진부 설명

전기발전보일러 내부설명

스털링엔진부 설명