투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기요청[(916공구(총괄, 9차, 10차)]

1. 우리본부에서 시행 중인 『지하철9호선 2단계 916공구 건설공사(총괄, 9차, 10차)』를 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바라며,

2. 공기연장에 따른 간접비 등 추가비용을 청구하지 않겠다는 시공사의 의견을 첨부하였으므로 합의서 작성 시 합의내용에 부기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 지하철9호선2단계 916공구 건설공사(총괄,9차,10차)

나. 예산과목

- 도시기반시설본부,도시철도건설,도시철도건설사업,도시철도9호선2단계건설,시설비및부대비,시설비.

- 세입세출외현금(한국무역협회 위탁)

다. 준공기한 연기내용

(단위 : 천원)

구 분	총 괄		9차		10차		비고
	당 초	변 경	당 초	변 경	당 초	변 경
계약금액	159,609,860	159,609,860	14,101,860	14,101,860	5,500,000	5,500,000	변경 없음
기 간	’08.06.02 ~’15.08.31	‘08.06.02 ~'15.09.30	‘14.09.19 ~’15.08.31	‘14.09.19 ~'15.09.30	‘15.03.19 ~’15.08.31	‘15.03.19 ~'15.09.30	연기

라. 연기사유 : 가로수 식재 시기조정 및 공동도급사 계약해지에 따른 지분조정, 준공처리를 위한 행정처리

붙임 : 1) 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3) 책임감리원 검토의견 및 시공사 공기연장 요청서 각 1부.  끝.

	도시철도토목부장
주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	09/02 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-11224	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 9층(무교동)	/
전화	02-772-7222	/전송	02-772-7306	/		/	부분공개