문서번호	기전과-8756
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
문석기	09/02 이영목

북악·자하문터널 영상감시설비

카메라 하우징 사양 변경보고

2015. 9

북부도로사업소

(기 전 과)

북악·자하문터널 영상감시설비

카메라 하우징 사양 변경보고

북악 · 자하문터널 영상감시설비 구매설치와 관련하여 계약업체로부터 현장여건 등을 감안하여 카메라 하우징 변경(길이)이 필요하다는 의견이 제시되어 검토 후 변경승인 하고자 함.

１

변경요청내역

관련근거 : 납품자재 변경요청의 건(영국(서)15-101, ’15.8.26)

카메라 하우징 변경사양

구 분		제품특징	주요사양	비 고
카메라 하우징	당초	방진형타입 알루미늄	재질 : 알루미늄 6.5KG 외형 : 750(L)×195(H)×216(W)
	변경	방진형타입 Stainless Steel	재질 : 스테인레스 4.5KG 외형 : 400(L)×127(ϕ)

변경사유 : 하우징 사이즈(750mm→400mm)를 변경하여 차량에 의한

파손방지

2

변경보고

카메라 하우징 비교검토

변경수량 : 6대

재질 및 가격조사

- 재 질 : 알루미늄(750mm) → Stainless Steel(400mm)

- 가  격 : 650,000원/대 → 900,000원/대(유통물가)

검토결과 : 현장여건 및 내 부식성이 좋은 Stainless Steel로 변경승인

향후조치

변경승인 통지

사양변경에 따른 비용정산 : 없음

별첨 : 관련 공문서 1부. 끝.