문서번호	정수시설과-2915
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김한기		안길찬	09/02 박기석
협조
	정수과장		임건혁

약품투입배관교체작업계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

강북아리수정수센터

(정수시설과)

약품투입배관교체 작업계획

응집제를 투입하는 인젝터 및 배관교체에 따른 작업계획을   수립하여 아리수생산에 차질이 없도록 하고자 함

□ 공사개요

○ 인젝터설비 4개소 교체

○ 약품투입배관 4개소 교체

□ 작업일정

○ 3, 4계열 : 9. 4(금) 09:00 ~ 18:00 (9시간)

○ 1, 2계열 : 9. 7(월) ~ 9.18(금)09:00~15:00(각각6시간)

- 기간중 침전지 계열별 수로청소시 작업실시

□ 작업전 조치사항

○ 업무관련 담당자 회의 개최

- 대상: 정수과(제어실, 실험실), 정수시설과 담당자

○ 작업개시전 응집제 수동투입 준비(2015.9.3) 및 주입률 실측

- 임시 약품투입배관 설치 : 2개소 30m

○ 침전지 계열별 수로 배수청소시 공사병행

□ 교체작업중 조치사항

○ 혼화기운전

○ 회수펌프 운전시

- 3.4계열 작업시 1~2계열 착수정으로 회수

- 1.2계열 작업시 3~4계열 착수정으로 회수

○ 작업 안전관련 사항점검 및 약품투입상태 수시확인