문서번호	계약심사과-14653
결재일자	2015.9.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		심사총괄팀장	계약심사과장
하옥수		이정임	전결 09/03 김성규
협 조
	토목심사팀장			김종호
	설비심사팀장			김중영
	주무관			박종일

「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사」 설계경제성 심사 실행계획

2015. 9.

계약심사과

「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사」

설계경제성 심사 실행계획

「뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사」에 대한 설계경제성 심사 전담팀을 구성하고, 설계경제성 검토(VE) 실행 계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 계약심사 방법 개선을 통한 예산절감 계획(시장방침 제359호, ’12.11.19)

□ 설계경제성 심사제도 도입계획(행정1부시장방침 제29호, ’15.01.30)

Ⅱ		심사개요

□ 발주부서 : 상수도사업본부 생산부(생산관리과)

□ 사  업  명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사

□ 사업내용 : 농축조 2지 신설 및 기존 2지 재건설

□ 위    치 : 성동구 성수동1가1동 642번지(뚝도정수센터내)

□ 공 사 비 : 9,326백만원

□ 사업기간 : ’15.01.01 ∼ ’16.12.31

□ 설계 공정률(%) : 60%

Ⅲ		심사계획

□ 주요 심사내용

○ 건설공사의 설계, 시공, 유지관리 등 경제성 검토

○ 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성 검토

○ 새로운 기술 및 신공법 적용의 가능성 검토

□ 시행방법 : 전담팀을 구성하여 심사

○ 전담팀 : 10명 내외

구 분	구 성 내 용	역 할
VE책임자 (보조 포함 3명)	▸******************* ************ - 진행 및 보고서 작성 보조 2명 (중급기술자)	설계경제성 심사 업무 진행 및 총괄 심사결과 종합 결과보고서 작성 등
VE담당관 (1명)	▸**********	회의 진행 및 결과 정리
팀 원 (6명)	▸ 토목분야 외부전문가 2명 - ******************* - ******************** ▸ 기계분야 외부전문가 1명 - ******************* ▸ 내부검토위원 3명 - *********** - *********** - ***********	정보 분석, 검토, 아이디어 제안, 발표, 평가, 보고서 작성 등
발주부서 및 설계자	▸ 발주담당, 설계업체 설계자	사업설명 등 (설계내용, 현장설명 등)

□ 설계경제성 심사 시행절차 - (신청서 접수 후 24일 소요)

추진일자		검 토 절 차		업 무 내 용
’15. 08. 27		설계경제성 심사 신청 (발주기관 → 계약심사과)		▸설계경제성 심사 신청서 접수
’15. 09. 02 ~ 09. 03(2일)		설계경제성 심사 계획수립 (총괄 담당)		▸팀 구성 및 회의실 확보 ▸추진일정, 시행방법 등 ▸자료 사전검토(심사위원)
’15. 09. 10 ~ 9. 18(7일)		검토회의 및 대안구체화 (심사 전담팀)		▸현장 확인 및 1차 검토회의 - 사업설명(설계자) ▸2차 검토회의 : 대안 구체화 - 아이디어제시, 결과이행 회의
’15. 09. 21 ~ 09. 23(3일)		대안설계서 작성 및 최종 의사결정 (심사 전담팀)		▸대안 설계서 작성(설계사) 제출 ▸최종 검토회의 : 보완 및 의사결정
’15. 10. 02 (1일)		심사결과 통보 (계약심사과 → 발주기관)		▸최종(안) 설계서 작성(설계사) ▸결과보고서 작성 ▸심사결과 통보

□ 설계경제성 심사 검토회의 세부일정

일 시	내 용
09. 10(목) 14:00~17:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 상수도본부/뚝도아리수정수센터
09. 17(목) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 계약심사과 내 회의실
09. 18(금) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 계약심사과 내 회의실
09. 23(수) 10:00~18:00	- 최종 검토회의 : 보완 및 의사결정 ‣ 장소 : 계약심사과 내 회의실

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 7,704천원

○ 외부전문가 수당   : 6,904천원

— 기술사 4명     : 5,456천원(4명 × 341천원 × 4일)

— 중급기술자 2명 : 1,448천원(2명 × 181천원 × 4일)

○ 회의실 다과비 등 운영비 800천원

□ 예산과목 : 계약심사업무 효율화, 계약심사업무 전문성 강화, 공공공사 사전계약심사제 운영, 일반운영비(201), 사무관리비(01)

Ⅴ		향후계획

□ 설계경제성 심사결과 통보  - - -  - - -  ’15. 10. 02

※  발주기관(부서)은 설계경제성 심사 결과 내용이 비용을 현저히 증가 시키는 등 적용하기 곤란한 특별한 사유가 없으면 설계에 반영하여야 하고, 반영이 곤란할 경우 사유를 계약심사과로 통보

첨부 : 설계경제성 심사 의뢰 공문 및 신청서 각 1부.  끝.