문서번호	물재생시설과-261
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
조귀현		황철호	09/03 이철해
협조
	실무사무관		임두선

물재생센터 시설비 사업 추진현황 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 시설비사업 추진현황 보고

□ 센터별 시설비사업 예산편성 현황                  (단위: 백만원)

센터별	계		시 설 비 사 업				비 고
			기전분야		시설분야
	건수	예산액	건수	예산액	건수	예산액
계	123	49,575	87	31,423	37	18,152
중랑	33	14,598	26	9,476	7	5,122
난지	21	11,356	13	6,846	8	4,510
탄천	28	11,270	17	6,700	11	4,570
서남	41	12,351	30	8,401	11	3,950

□ 사업추진 현황 (‘15.8.31현재)                          (단위: 건)

센 터 별	사업대상	추진현황				비고(계획변경)
		설계중	공고중	추진중	완료
계	123	3	4	73	43	2
중 랑	33	3	4	20	6	1
난 지	21			16	5	1
탄 천	28			20	8
서 남	41			17	24

※ 소규모 수선비 제외

○ 사업계획 변경(2건)

- 중랑 슬러지 전처리시설 제작구매설치 ⇒ 농축기제조 구매설치(방침완료)

- 난지 관사리모델링 공사 ⇒ 보수․보강이 시급한 차집시설물 및 센터내 시설물 보수추진

□ 추진현황 분석

○ 사업대상 123건중 94%(116건)가 추진완료 또는 공사 진행중으로 정상추진

○ 부진사업 중 4건은 설계완료후 공고중에 있고, 3건은 설계중에 있음

○ 미발주(부진) 사업현황

센터별	사 업 명	예 산 액	추진현황	비 고
중랑	#3처리장 초침 생오니 전동밸브 교체	280,000	공고중
	#3처리장 슬러지수집기 진공관 개량	132,000	공고중
	3처리장 슬러지 호퍼실 고속자동문 설치	100,000	공고중
	농축기 제작구매설치	900,000	설계중	계획변경
	소화조 유지관리	900,000	공고중
	#3,4처리장 침사지 초침 유입수문 수리	210,000	설계중
	#2생물반응조 계측기 설치	66,000	설계중

○ 탄천 및 서남 집행잔액 추가사업 추진 현황

- 사업대상 10건중 2건은 공사진행중이며, 6건은 설계완료 심사 및 공고중에 있으며, 2건은 설계중에 있음

센터별	사 업 명	예 산 액	추진현황	비 고
탄 천	정문 절개지 사면 정비공사	600,000	공사중	토목시설물보수공사 포함집행
	제2처리장 MDF 수문설치공사	300,000	심사중
	점검업무용 CCTV 구매설치	450,000	심사중
	보안 CCTV 모니터시스템 구매 설치	160,000	공사중
	터보송풍기 제조구매설치	800,000	설계중
서 남	악취모니터링 시스템 구매설치	300,000	심사중
	#2 분배조 보수공사	500,000	공고중
	하수슬러지 임시야적장 설치공사	100,000	공고중
	#1 소화조 염화제이철 투입설비 설치	100,000	공고중
	터보송풍기 제조구매설치	800,000	설계중

□ 행정사항

○ 금년도부터 예산회계 출납폐쇄기한이 단축(2015.12.31) 되었음을 감안 아직까지 발주하지 못한 부진사업은 조속히 추진토록 센터에 통보

붙임 : 2015년 센터별 시설비사업 추진현황 1부.  끝.