국회의원 요구 자료 제출

시 행	정보공개정책과-17233	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,총무과장

주무관	기록관리팀장	정보공개정책과장	행정국장		결재
윤정두	김종필	조영삼	09/03 강태웅
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1093번, 이미경 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

이미경 의원(국토교통위원회, 새정치민주연합)

○ 요구번호 : 1093번

6) 서울기록원 건립 관련

- 지금까지의 세부 추진경과 및 향후 추진일정

- 연도별 예산 대비 확보현황(2015년 예산, 2016년 서울시 예산안 포함)

□ 의원님께서 요구하신 서울기록원 건립관련 세부 추진경과, 향후 추진일정 및 연도별 소요예산 현황을 아래와 같이 제출합니다.

○ 세부 추진경과

- ’13.03      : 건립부지 확정(은평구 녹번동 구 질병관리본부 부지 내)

- ’13.04~08 : 타당성 조사 및 기본계획 학술연구용역 시행

- ’13.06.14  : 서울기록원 건립계획 수립

- ’13.10.28  : 市 투자심사(결과 : 조건부 승인)

- ’14.01.09  : 서울시 기록관리에 관한 조례 제정

· 서울기록원의 설치 근거, 기능 등을 조례로 규정

- ’14.03.24  : 중앙 투자심사(결과 : 적정)

- ’14.04.24  : 시의회 공유재산관리계획 승인

- ’14.07~12 : 설계 현상공모

· 당선작 : “기록의 터” 해안건축사무소(총 10개 작품 출품)

- ’14.12.02  : 서울기록원 건립 자문단 구성

· 기록 전문가, 市 공공건축가, 지역대표 등 외부전문가 10명으로 구성

· 서울기록원의 운영방향, 목표, 운영프로그램 등 논의

- ’15.03.27  : 2단계 市 투자심사(결과 : 적정)

· 기본 건축 설계안에 대한 적정성 심사

- ’15.04.02  : 은평구 지역 설명회 개최

· 장    소 : 은평구청 대회의실,

· 참    석 : 구청장, 시의원, 구의원, 은평구 국장, 소관과장 등 50명

· 내    용 : 서울기록원 건립 추진사항 설명 및 의견청취

· 주요의견 : 사업 지연 없도록 추진, 은평구 발전에 기여하는 기록원으로 발전 시켜주기를 희망

- ’15.09현재  : 실시설계중(’15.10월 완료 예정)

○ 향후 추진일정

- ’15.10월	: 실시설계 완료

- ’15.10~12  : 공사발주 및 착공

- ’17.12월	: 준공 및 개관

○ 연도별 소요예산

(단위 : 백만원)

구 분	계	‘14년	‘15년	‘16년	‘17년
총 사업비	44,515	300	3,734	18,140	22,341
설계비	1,842	300	1,542	-	-
감리비	3,040	-	100	1,470	1,470
공사비	35,201	-	1,925	16,638	16,638
기타(장비비 등)	4,432	-	167	32	4,233

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (정보공개정책과)	담당사무관	문인환
	☎2133-5595	담당자	윤정두
	작 성 일 :2015.9월