문서번호	교량안전과-236
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
이보람		이수근	09/03 이용심
협조

2016년 사업시행계획 검토보고

(원효대교 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

안전총괄본부

(교량안전과)

2016년 사업시행계획 검토보고

우리시에서 관리하는 원효대교에 대하여 안전점검 및 진단 결과 보수·보강이 필요한 구조물을 적기에 보수하여 시설물의 안정성 확보 및 내구성 증진을 위해 2016년 사업 시행을 계획하고 보고함.

Ⅰ		현 황

□ 시설물 현황

시 설 명	시 설 개 요	준공년도	구 조
원효대교	본 선 폭 20m, 연장 1,120m 접속교 폭 11.8~43m, 연장 944.3m 램 프 폭 7~10.8m, 연장 620m	1981	본 선 PSC 상자형교 접속교 PSCI빔교, PSC슬래브, SPG교 램 프 강상자형교, PSCI빔교

□ 산출근거

- 2010년 정밀안전진단용역, 2014년 정밀점검용역 보고서

Ⅱ		점검결과 주요적출사항

□ 주요 적출 사항

- 접속교 및 램프 콘크리트 균열, 망상균열, 백태, 철근노출

- 아스팔트 포장 균열, 망상균열 및 미끄럼 방지층 손상

- 신축이음 누수 및 후타재 마모, 균열

- 강재 거더 및 받침 강재 부식

- 본교 및 접속교 배수관 손상 및 이물질 퇴적으로 인한 배수 불량 등

□ 주요 적출 사항 사진

콘크리트 망상균열	바닥판 하면 망상균열 및 백태
교면포장 망상균열	신축이음 후타재 균열
거더 강재 부식	배수관 체결 불량 및 누수

Ⅲ		2016년 공사내역

□ 적출사항 보수방안

- 콘크리트 표면보수 및 단면보수 3,966㎡

- 교면포장 62a

- 신축이음교체 74m

- 강재도장 117㎡ 등

□ 보수공사 소요예산

- 원효대교 보수공사 : 1,675,000천원

Ⅳ		조치 계획

□ 조치 계획

- 상기 원효대교 안전점검(진단) 결과 적출된 보수 대상에 대해 “교량 보수·보강 사업 투자우선순위 결정기준”에 의거 2016년도 예산을 확보하여 보수코자 함.

붙임 : 1. 소요예산 산출 설명서 1부.

2. 교량 보수·보강사업 투자우선순위 결정기준 1부.  끝.