문서번호	토목부-18378
결재일자	2015.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	09/03 노우성
협조

암사대교 건설공사외 1개소 통합전면책임감리용역

설계변경(전체 20회, 12차 1회)검토보고

2015. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경(전체 20회, 12차 1회)검토보고

「암사대교 건설공사외 1개소 통합전면책임감리용역」에 대한 공사기간

연장에 따른 설계변경 검토 보고임

※ 암사감리 2015 - 489호(2015. 9. 2.) 감리 투입계획 변경 요청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 암사대교 건설공사외 1개소 통합전면책임감리용역

○ 계약금액 : 8,075,600천원(12차 : 283,000천원)

○ 계약기간 : ’06.6.1. ∼ ’15. 9. 7.(12차 : ’15.5.23.∼’15.9.7.)

○ 계 약 자 : ㈜도화엔지니어링 대표 박승우외 1개사

□ 보고내용

○ 통합전면책임감리 시행 중인 ‘구리암사대교’ 및 ‘연결도로’ 건설공사의 계약기간 연장으로 안전·시공·품질관리 등 현장관리 및 시설물 인수·인계를 위하여는 감리 용역기간 및 용역비 조정 필요

- 공사 계약기간

‣ 구리암사대교 건설공사(15차) : ’14.12.11. ∼ ’15.10.30.

‣ 구리암사대교 연결도로 건설공사(5차) : ’15.3.14. ∼ ’15.12.31.

○ 감리 변경현황

- 계약기간

구분	용 역 기 간			비고
	당 초	변 경	증·감
전체	'06.06.01.~'15.09.07.	'06.06.01.~'15.11.30.	증 2.7월
12차	'15.05.23.~'15.09.07.	'15.05.23.~'15.11.30.	증 2.7월

- 계약금액

구분	총 용 역 비(원)			비 고
	당 초	변 경	증 · 감
전체	8,075,600,000	8,225,600,000	증 150,000,000
12차	283.000,000	433,000,000	증 150,000,000

□ 조치의견

○ 상기와 같은 사유로 ‘암사대교 건설공사외 1개소 통합전면책임감리 용역’에 대해 설계변경하여 감리업무에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙  임 : 1) 변경내역서 (전체 20회, 12차 1회) 각 1 부.

2) 설계변경 요청서 1 부.   끝.