문서번호	방재시설부-11882
결재일자	2015.9.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	09/04 임춘근
협조
	주무관		임성은

「경의선숲길 공원조성공사」 2단계 2차분 관급자재(철도레일) 구매계획 검토보고

2015. 09

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』 2단계 2차분

관급자재(철도레일) 구매계획 검토 보고

「경의선숲길 공원조성공사」 2단계 2차분 관급자재(철도레일) 구매 계획에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–704(2015.08.28)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : ’13. 9. 30 ~ ’16. 3. 31

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

관급자재 구매 검토

○ 철도레일 수요 현황(설계물량)

구 분		규 격	수 량	비 고
경의선숲길 2단계 1차분	연남동, 새창고개	50KgN	2,408m(120,400kg)	온비드(공매) 계약
	염리동	50KgN	346m(17,300kg)	수의계약
경의선숲길 2단계 2차분	원효동, 신수동 와우교 구간	50KgN	1,604m(80,200kg)	발주요청분

○ 철도레일 구매 검토

- 경의선숲길 공원조성공사 2단계 2차분 보완설계시 경의선 철도가 운행되었던     구간임을 알리는 철도레일 도입에 따라 관급자재(철도레일) 필요

- 공원 컨셉상 기능 유사로 신규제품 불필요하며, 중고레일 구매코자 온비드     (공매)시스템 상 입찰 공고안 확인하였으나 발주요청물량과 공매시기에     적합한 대상물이 등록되어 있지 않음.

- 공사일정에 차질이 예상되어 온비드 공매를 통해 중고레일 낙찰받은 업체를 대상으로 자재 수급 여부 조사하였으며, 경의선숲길-2단계 1차 염리동 구간 중고레일 납품업체인 ****** 에서 자재 수급 가능함을 확인

○ 철도레일 자재구매 방안

- 1안 : 철도레일 생산업체를 통한 구매(신규제품)

- 2안 : 온비드를 통해 철도레일 낙찰받은 고재처리업체에서 직접 구매

	1안	2안
장점	자재품질 균일	- 경의선숲길 공원공사 2단계 2차분 필요한 자재수량만큼 구매 가능 온비드를 통해 철도레일 낙찰받은 업체로 자재 출처가 확실.
단점	- 공원 컨셉상 기능 유사로 신규제품 불필요 - 예산 과다 소요	- 고재처리업체에서 보관하고 있는 중고레일의 경우 고재처리용으로 보관상태가 불량할 수 있음 ※ 현장방문을 통하여 양질의 중고레일 선별 가능
소요비용 (부가세포함)	1) 레일 구입비 : 1,604×73,180원/m당 = 117,380,720원 2) 절단,운반,상·하차비 = 미정 소계 : 117,380,720원 (절단,운반, 상·하차비 별도)	1) 중고레일 구입비 :1,604m×39,600원/m당 = 63,518,400원 2) 절단,운반,상·하차비 = 2,530,000원 소계 : 66,048,400원
적용		〇

Ⅳ

검토결과

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 2단계 2차분 구간 철도레일 구매와 관련하여 수요물량과 공사일정을 감안하여 온비드에서 낙찰받아 중고레일 보관 중인 고재처리업체(****)를 통하여 자재 수급함이 타당할 것으로 판단되어,

○  『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 “아”목』에 의거, 수의계약으로 관급자재(중고레일) 구매코자 함.

붙  임 : 1) 해당업체  계약체결 서류 및 사업자 등록증 각 1부.

2) 중고레일 견적서 1부.  끝.