문서번호	정수시설과-2959
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
송종봉		안길찬	09/04 박기석
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고 (2015년기계설비보수공사-연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

강북아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리 센터에서 시행하는 2015년도 기계설비 보수공사(연간단가)에 대하여 계약물량과 상이하고, 신규 공정 발생에 따른 설계변경요인이 발생하여 이를 설계변경에 반영코자 하며, 보험료 및 산업안전보건관리비 등 경비를 정산코자 합니다.

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2015년 기계설비 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015. 4. 27 ~ 2016. 03. 31

다. 도 급 액 : 92,376,000원

라. 공사개요

1) 모터펌프6대 수리        2) 청소용배관 설치

3) 중염소투입배관교체      4) 탈수기 구동감속기 등 배출수처리시설 보수

5) 크레인 보수 등

마. 도 급 자 : (주)유진아이엔비  대표  정 요 한

2. 보 고 내 용

가. 설계변경사유

1) 당초 기계설비 수리를 위해 연간단가계약을 추진하였으나 당초 계약물량과 상이하여 정산코자 하며, 청소용배관설치, 중염소투입배관교체, 탈수기 구동감속기 보수, 크레인보수 등 신규물량에 대하여 설계변경에 반영코자 함.

2) 작업지시에 의한 신규공종 및 물량증감 내용

- 신규공종 : 청소용배관설치, 중염소투입배관교체, 탈수기 구동감속기 외 배출수처리설비 보수, 크레인보수 등

- 시공물량 증감 : 모터펌프수리, 도장, 이산화탄소 주입설비보완 등 물량증감

3) 주요공종 수량변경내용

공 종	단 위	수 량		비 고(증․감)
		당 초	변 경
모터펌프 수리	대	4	6	증) 2
이산화탄소 주입설비 보완	식	1	0	감) 1
기타 설비보수	식	1	0	감) 1
청소용배관설치	식	0	1	증) 1
중염소투입배관교체	식	0	1	증) 1
배출수처리시설 정비	식	0	1	증) 1
크레인보수	식	0	1	증) 1

4) 공사비 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
합 계		92,376,000	101,244,000	+8,868,000
도급비	계	92,376,000	101,244,000	+8,868,000
	공급가액	83,978,182	92,040,000	+8,061,818
	부가세	8,397,818	9,204,000	+806,182
관급자재비 등		0	0	0

5) 보험료 및 경비 정산내용

구 분		산출금액	정산금액	증․ 감	비 고
합 계		3,638,203	1,311,582	-2,326,621
경비	건강보험료	923,795	0	-923,795
	연금보험료	1,353,088	0	-1,353,088
	노인장기요양보험료	60,508	0	-60,508
	산업안전보건관리비	1,024,044	1,311,582	+287,538	내역서
	환경보전비	276,768	0	-276,768

따로붙임  1. 설계변경 결과서 및 변경내역서 1부

2. 보험료 완납증명원 1부

3. 산업안전보건관리비 사용내역서 1부

4. 합의서.  끝.